문서번호	토목부-330
결재일자	2017.1.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		명경출	01/05 김영수
협조
	주무관		장종환

공사(11차) 시행 계획 보고

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 1.

도시기반시설본부

토 목 부

공사(11차) 시행 계획 보고

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

우리 부에서 시행하고 있는 강남순환도시고속도로 8공구 건설공사(11차) 시행 계획에 대한 검토 보고임.

※ 2017년 예산 21,100백만원 (공사 : 19,700, 부대공 : 600, 감리 : 800)

공사개요

❍ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

❍ 공사규모 : 폭 4~10차로, 연장 7.96km(교량 2개소, 지하차도 4개소)

❍ 공 사 비 : 234,862백만원(11차 : 19,700백만원)

❍ 공사기간 : 2002. 7. 3. ~ 2018. 7. 31.(11차: 착수일로부터 `17.12.29.)

❍ 시 공 사 : 롯데건설(주) 외 1

❍ 감 리 사 : ㈜동명기술공단

추진경위

❍ 2002. 07. 03. : 공사착수

❍ 2003. 06. 02. : 공사중단(고가차도 반대민원)

❍ 2003. 11. 19. : 고가차도 지하화 시행방침(부시장 제395호)

❍ 2011. 02. 17. : 양재대로 지하차도 기본 및 실시설계 용역 완료

❍ 2011. 03. 01. : 공사재개

❍ 2014. 09. 16. : 과천시구간 도시계획사업 실시계획 인가고시

❍ 2014. 09. 24. : 구룡지하차도 개통

❍ 2014. 11. 19. : 보상협약 체결(과천시구간)

❍ 2015. 10. 30. : 과천시 1단계 구간 보상완료

❍ 2016.  7.      : 강남순환로 본선교량 접속

계약금액 집행현황

구 분	총 괄	기 발주	금회 발주	장 래 (천원)
		1~10차(준공)	11차
계약금액	234,862,000	95,458,500	19,700,000	119,703,500
(금액비율)	100.0%	40.6%	8.4%	51%
공사기간	`02.07.03.~ `18.07.31.	`02.07.03.~ `16.12.31.	착공일 ~ `17.12.29.

계약물량 집행현황

공 종			단위	총 괄	1~10차 (기발주)	11차 (금회시행)	장 래
토 공			m3	422,545	237,006	32,682	152,857
배 수 공			m	4,734	2,022	2,712	-
포 장 공			m2	232,661	70,341	89,158	73,162
조 경 공			주	52,480	-	1,225	51,255
상수도이설공			m	1,382	705	-	677
구조물공	본선교량	교각	기	8	8	-	-
		교대	기	1	1	-	-
		강교제작	톤	5,692	5,692	-	-
		강교가설	톤	5,692	5,692	-	-
		슬래브	m2	13,132	13,132	-	-
	주암교	구조물공	m3	6,314	6,314	-	-
		H-Pile	본	1,706	1,706	-	-
		버팀보	본	274	274	-	-
	매헌 지하차도	구조물공	m3	60,376	-	5,139	55,237
		H-Pile	본	18,525	6,912	8,123	3,490
		버팀보	본	4,264	61	638	3,565
		복공	m2	20,994	9,835	8,926	2,233
	염곡동서 지하차도	구조물공	m3	19,798	51	3,222	16,525
		H-Pile	본	7,646	-	2,088	5,558
		버팀보	본	810	-	190	620
		복공	m2	5,596	-	1,350	4,246
	구룡 지하차도	구조물공	m3	32,211	32,211	-	-
		H-Pile	본	13,506	13,506	-	-
		버팀보	본	1,207	1,207	-	-
		복공	m2	13,403	13,376	-	27
	대모 지하차도	구조물공	m3	25,184	-	-	25,184
		H-Pile	본	11,386	-	-	11,386
		버팀보	본	678	-	-	678
		복공	m2	12,803	-	-	12,803

공사 발주계획

❍ 공사기간 : 착공일로부터 2017.12.29.까지

❍ 발주금액(11차)

(단위 : 천원)

전 체	1 ~ 10차	금회(11차)	잔 여 분	비고
234,862,000	95,458,500	19,700,000	119,703,500

❍ 공사물량 금액(11차공사 : 19,700백만원)

(단위 : 백만원)

구 분		공 사 개 요	공사금액
토 공		- 사토운반(토사 32,682m3) - 콘크리트 깨기 1,204m3	680
배수공		- 원심력콘크리트관 2,712m - 맨홀공 117개소, 흙막이공 267m, 초기우수처리 4개소	1,209
구조물공	본선교	- 배수시설(초기우수처리시설 8개소) - 교명판 및 설명판 92개	89
	주암교	- 배수시설(초기우수처리시설 4개소) - 교명판 및 설명판 6개	18
	매헌 지하차도	- 터파기 44,774m3 - 가시설(H-pile 8,123m, 주형보 463본, 복공판 8,926m2) - ASG차수공 568m3 - 구조물공 5,139m3	6,637
	염곡동서 지하차도	- 터파기 17,523m3 - 가시설(H-pile 2,088m, 주형보 310본, 복공판 1,350m2) - 구조물공 3,222m3	3,434
	기타 구조물	- 선암지하보도 철거	90
포장공		- 포장(동상방지층 10,024m3, 보조기층 11,792m3, 표층 89,158m2)	1,108
조경공		- 교목 및 관목 식재	24
부대공		- 교통표지판 철거 2개, 과천ITS선로 이설 공사 - 공사장 가림막 2,657m	1,256

조치의견

❍ 위와 같이 시설공사(11차)를 시행하여 지하차도(매헌, 염곡동서) 공사 추진에 만전을 기하고자 함.

붙 임  1. 감리검토의견서 1부.

2. 설계서 1부.

3. 예정공정표 1부.  끝.