문서번호	토목부-858
결재일자	2017.1.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	광역도로과장	토목부장
박상철	진재섭	01/12 김영수

공사 설계변경 시행보고(전체1회,1차1회)

(남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 1

도시기반시설본부

(토 목 부)

제 목 : 건설공사 설계변경 시행 보고

「남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사(전체,1차)」의 공종을 현장 여건 변동에 맞게 설계변경 하여 공사 시행에 만전을 기하고자 함

□ 공사개요

◦ 공 사 명 : 남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사

◦ 공사규모 : 도로구조개선 B=46m, L=1,069m

◦ 공사금액 : 154억원

◦ 공사기간 : ‘16.03.25 ~ ’19.03.24(1차:‘16.03.25.~’17.01.18.)

◦ 시 공 사 : ㈜삼일기업공사 외 1개사

◦ 감 리 사 : ㈜동일기술공사 외 3개사

□ 설계변경내용

○ 전체변경

▷ 주요변경사항

- 수목식재 및 이식, 자연석문양 소형블럭 수량변경

- 도급자용 가설사무실 변경, GTB가설교량 구조변경

- 현장여건에 따른 변경

▷ 변경내역

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증∙감	비 고
공 사 비	18,469,647	19,142,297	증)672,650
도 급 비	15,445,647	16,118,297	증)672,650
관급자재비	3,024,000	3,024,000	변경없슴

▷ 준공기한 : 변경없슴

○ 1차1회

▷ 주요변경사항

- 전체공사 변경과 현장 여건에 맞게 내역 조정

▷ 변경내역

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증∙감	비 고
공 사 비	2,173,478	2,300,000	증)126,522
도 급 비	2,000,000	2,168,408	증)168,408
관급자재비	173,478	131,592	감)41,886

▷ 준공기한

구 분	당 초	변 경	비 고
1차공사	‘16.03.25.~’17.01.18	‘16.03.25.~’17.06.08	증)141일

▷ 준공기한연기사유

- 조경수목 제거, 이식수량 재조사 및 현장외 제거 장소 결정 지연(50일)

- 가설교량 민원사항 반영 및 현장 여건 변동(91일)

○ 건설폐기물처리용역

▷ 설계내역 : 변경없슴

▷ 준공기한

구 분	당 초	변 경	비 고
전체용역	‘16.04.05.~’19.03.30	‘16.04.05.~’19.03.30	변경없슴
1차용역	‘16.04.05.~’17.01.18	‘16.04.05.~’17.06.08	증)141일

□ 조치의견

◦ 감리단으로부터 제출된 설계변경 내용을 전체,1차공사 계약 물량 및 준공기한으로 설계변경 하여 공사 시행에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 1. 공사설계변경내역 2부.

2. 감리단 보고서 2부.  끝.