문서번호	한양도성도감-407
결재일자	2017.1.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	도성관리팀장	한양도성도감과장	문화본부장
이성산	곽동진	심말숙	01/11 고홍석
협 조

- 문화재 보호 및 순성객의 안전사고 예방을 위한 -

한양도성 통합 관제망 실시설계 용역 추진계획(안)

2017. 01.

문 화 본 부

(한양도성도감)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	중구청, 종로구청 등
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 문화재 보호 및 순성객의 안전사고 예방을 위한 -

한양도성 통합 관제망 실시설계 용역 추진계획(안)

한양도성 통합 관제망 구축 사업의 일환으로 재난방재시설 미흡구간의 CCTV 보강을 위한 실시설계 용역을 아래와 같이 추진하고자 보고 드림.

Ⅰ				추진근거
					ㅊㅊ	ㅊ

❏ 서울 한양도성 보존·관리 및 활용 종합계획(‘13.10.)

❏ 서울 한양도성 재난방지 시스템 구축계획(‘14.12, 본부장 방침)

❏ 한양도성 현장관리․연구조직 설립계획(‘15.03, 시장방침 제44호)

❏ 한양도성 주변 CCTV 설치 등 통합관제센터 구축 계획(‘15.06.)

Ⅱ				추진경위
					ㅊㅊ	ㅊ

❏ ‘13. 05. : 서울 한양도성 보존․관리․활용 토론회 개최

- 한양도성의 방재 관리 필요성 제시

❏ ‘13. 10. : 서울 한양도성 보존·관리 및 활용 종합계획

- ‘한양도성의 방재․방범 시스템 구축’ 제시

❏ ‘14. 02. : 한양도성 자문위원회 개최

- 관광객 안전, 도성 모니터링 등을 위해 CCTV 설치 등 시스템 구축 필요

❏ ‘14. 12. : 서울 한양도성 재난방지 시스템 구축계획 수립

❏ ‘15. 06. ~ ‘16. 03. : 통합관제센터 구축 기본 및 실시 설계

❏ ‘16. 05. ~ 09. : 관제센터 구축 및 낙산구간 CCTV 설치 공사 시행

Ⅲ				운영현황
					ㅊㅊ	ㅊ

□ 관제센터

□ 위    치 : 종로구 율곡로 283 서울디자인지원센터 6층 1개소

□ 면    적 : 281㎡(관제실 98㎡, 장비실 44㎡, 기타 139㎡)

□ 주요기능

- 기관별로 분산·운영 중인 한양도성의 통합영상 관리기반 구축

- 문화재 훼손지 및 통제구역 출입예방을 위한 안내방송

- 현장에 있는 시민이 비상벨을 활용하여 관제센터와 음성통신 기능

□ 관제인력 : **********************

□ 운영체계 : **********************

□ 관제현황 : 총 125대

********************************

************************************

□ CCTV 미 연계구간

***************************

***********************************************************************************

Ⅳ				추진계획
					ㅊㅊ	ㅊ

❏ 추진방향

□ 한양도성 중 재난방지시설 미흡구간에 CCTV 카메라 신규 설치

□ 중부공원녹지사업소, 자치구 등에서 운영 중인 한양도성 주변 CCTV 연계

□ 한양도성, 순성길 등 시설물 관리에 취약한 구간에 CCTV 우선 설치

❏ 과업내용

□ 한양도성 방재시설 미흡구간 현장조사

□ 미흡구간 CCTV 설치방안 및 관제센터 연계방안 검토·설계

□ 타 기관 운영 중인 CCTV 설비 연계 협의 및 방안 검토·설계

□ 기타 도면, 내역서, 시방서 작성 등

❏ 대상구간 : 약 2㎞

*********************************************************************

************************************************

*********************************************

**********************************************************************************

❏ 추진내용

□ 용 역 명 : 한양도성 통합 관제망 구축 실시설계 용역

□ 용역기간 : 착수일로부터 2개월

□ 계약방법 : 1인 견적 수의계약

- 사  유 : 추정가격이 2천만원 이하인 소액공사이며 산악 및 암반의 지형 특성상 낙산구간 CCTV 설치공사 실시설계를 수행한 경험이 있는 업체와 수의계약하여 시행착오를 최소화 하고자 함.

- 근  거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제30조 제1항 제2호

- 대상업체 : ㈜ 부광네트워크(대표 : 박경진)

□ 예산사항

- 예산과목 : 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존 관리 활용, 한양도성 보존 정비, 한양도성 통합 관제망 구축 및 운영(문화재 방재시설 유지관리)

- 소요예산 : 21,000천원

❏ 기타사항 : 공사발주 및 시공감독은 자체시행

Ⅴ				추진일정
					ㅊㅊ	ㅊ

❏ ‘17. 1. : CCTV설치 실시설계 용역 발주 및 사업자 선정

❏ ‘17. 2. ~ 3. : CCTV 설치 실시설계 용역시행

❏ ‘17. 3. ~ 4. : CCTV 설치 공사 발주 및 사업자 선정

❏ ‘17. 4. ~ 9. : CCTV 설치 공사 및 준공

붙임  과업내용서 1부.  끝.