문서번호	계약심사과-918
결재일자	2017.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		심사총괄팀장	계약심사과장
임장경		최광운	01/16 안호
협 조
	건축심사팀장			서홍일
	설비심사팀장			최주용
	주무관			임종호

「남산예장자락 재생사업 실시설계」 설계경제성(VE) 심사 실행계획

2017. 1.

계약심사과

「남산예장자락 재생사업 실시설계」

설계경제성(VE) 심사 실행계획

도시기반시설본부에서 추진하고 있는「남산예장자락 재생사업 실시설계」에 대한 심사 전담팀을 구성하고, 설계경제성(VE) 실행 계획을 수립하여 추진하고자 함

※ 동 사업의 기본설계에 대하여 ’16.9.23 설계경제성 심사를 완료함【채택아이디어 75건, 절감율 2.2%】

Ⅰ		추진근거

□ 건설기술진흥법 시행령 제75조

□ 설계경제성 심사 확대 시행계획(행정1부시장방침 제45호, ’16.02.15)

Ⅱ		심사개요

□ 추진부서 : 도시기반시설본부(방재시설부)

□ 사  업  명 : 남산예장자락 재생사업 실시설계

□ 위    치 : 중구 예장동 4-1번지 주변

□ 사업내용 : 남산 예장자락 재생사업(공원․주차장)

- 규  모 : 공원조성 16,373㎡, 부대시설 16,992㎡

- 주차장 : 버스면 39면, 일반주차 4면

□ 공 사 비 : 42,014백만원

Ⅲ		심사계획

□ 주요 심사내용

○ 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

○ 공사 시행의 적정성 및 사용자 편의성

○ 시설물 안전 및 고효율 공법 적용의 가능성 등

□ 시행방법 : 전담팀 구성하여 심사

○ 전담팀 : 20명 내외

구 분	구 성 내 용	역 할
VE책임자 (3명)	▸외부 설계VE 전문가 3명 - (CVS) 허재영 소장 한국가치관리기술연구소 - 진행 및 보고서 작성 2명	설계경제성 심사 업무 진행 심사결과 종합 결과보고서 작성
VE담당관	▸ 임장경 주무관	심사 총괄 및 결과보고서 정리
팀 원 (6명)	▸ 외부 검토위원 5명 - (건축) 조민수 원장 한국건설안전기술원 - (건축) 윤혜정 대표 건축사사무소 나래안 - (토질) 박윤규 부사장 한맥기술 - (조경) 이두열 대표 EM디자인 - (전기) 조계술 교수 중부대학교 ▸ 내부 검토위원 1명 - (전기) 정대진 주무관	정보 분석, 검토, 아이디어 제안, 발표, 평가, 보고서 작성 등
발주부서 및 설계자	* ***** *********	사업설명 등 (설계내용, 현장설명 등)

□ 설계경제성 심사 시행절차

추진 일정		검토 절차		업무 내용
’17. 1. 12		설계경제성 운영 의뢰 (발주기관 → 계약심사과)		▸설계경제성 심사 신청서 접수
’17. 1. 16		설계경제성 심사 계획수립 (VE담당관)		▸추진일정, 시행방법 등 ▸자료 사전검토(심사위원)
’17. 1. 25 ~ 2. 10(11일)		설계경제성 검토회의 (심사 전담팀)		▸현장 확인 - 사업설명(설계자) ▸1,2차 검토회의 : 대안 구체화 - 아이디어제시, 결과이행 회의 ▸최종 검토회의 : 보완 및 의사결정
’17. 2. 10 ~ ’17. 2. 13(2일)		설계경제성 심사 제안서 통보 (계약심사과 → 발주기관)		▸설계경제성 심사 제안서 통보
’17. 2. 14 ~ 2. 16(3일)		제안서 검토 및 반영계획 제출 (발주기관 → 계약심사과)		▸설계경제성 심사제안서 수용 여부 결정 및 통보
’17. 2. 24		심사결과 통보 (계약심사과 → 발주기관)		▸최종 결과보고서 작성 ▸심사결과 통보

□ 설계경제성 심사 검토회의 세부일정

일 시	내 용
’17.1.25(수) 10:00~14:00	- 사업설명 및 현장답사 ‣ 장소 : 양재배수지 주변 사무실
’17.2.01(수) 10:00~18:00	- 1차 검토회의 : 아이디어 제시, 대안 구체화 ‣ 장소 : 계약심사과內 회의실
’17.2.02(목) 10:00~18:00	- 2차 검토회의 : 대안에 대한 가치평가 및 분석 ‣ 장소 : 계약심사과內 회의실
’17.2.10(금) 10:00~18:00	- 최종 검토회의 : 이행회의 및 제안채택 ‣ 장소 : 계약심사과內 회의실

Ⅳ		소요예산

□ 소요예산 : 12,304천원

○ 외부전문가 수당 : 11,304천원

— 리더(기술사+보고서작성)   : 2,601천원(2,601천원 × 1명)

— 위원(기술사)                : 6,695천원(1,339천원 × 5명)

— 퍼실리테이터(중급기술자) : 2,008천원(1,004천원 × 2명)

※「설계경제성심사제도 운영현황 및 개선방안」(계약심사과-10559(’15.6.15))에 따라 산출

○ 회의다과비 등 운영비 : 1,000천원

□ 예산과목

○ 공공재생계획수립, 공공개발 및 공공공간 확충(도시개발), 남산예장자락 재생사업, 시설부대비

Ⅴ		향후계획

□ 설계경제성 심사결과서 통보  - - -  - - -  ’17.2.24

붙   임 : 1) 설계경제성 심사 요청 공문 1부.

2) 설계경제성 심사 신청서 1부.  끝.