문서번호	조경과-651
결재일자	2017.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장		푸른도시국장
변동풍	송동명	이원영		01/13 최광빈
협 조

2017년 가로변 녹지량 확충사업 추진계획

2017. 1.

푸른도시국

(조경과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2017년 가로변 녹지량 확충사업 추진계획

가로변 유휴공지 발굴과 녹화를 통해 녹지량을 확충하고 소음, 대기오염 저감 및 쾌적한 가로환경을 제공하고자 함

1		추진방향

❍ 가로 유휴공지(중앙분리대, 안전지대, 고가아래 등)에 녹지 확충

❍ 빗물이 유입될 수 있도록 빗물유입화단 조성

❍ 가로숲(그늘목) 조성 및 소규모 휴식공간 조성

❍ 단풍과 열매, 꽃 등이 아름다운 수종 도입

❍ 경관을 저해하는 STS, 로프 등 녹지 보호 휀스 제거

2		사업개요

❍ 대    상 : 시(市)도로 유휴공지(중앙분리대, 안전지대, 고가아래 등)

❍ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년

❍ 사업내용 : 가로 유휴공지 녹지 조성, 향토수종 및 지피식물 식재 등

❍ 총사업비 : 12,514백만원(기투자 7,580, 2017년 3,224, 2018년  1,710)

3		최근 3년 간 추진실적

(단위 : ㎡, 백만원)

구 분	합 계	2014년	2015년	2016년
개소수	86	30	27	29
면 적	74,438	23,294	12,309	38,835
사업비	7,580	2,626	2,230	2,724

4		2017년 추진계획

□ 사업개요

❍ 대    상 : 중구 장충단로 등 21개소

❍ 사업규모 : 48,840㎡

❍ 사업기간 : 2017. 1월 ~ 11월

❍ 사업내용 : 가로 유휴공지 녹지 조성, 향토수종 및 지피식물 식재 등

- 세부사업 추진내용 : 붙임 3. 세부사업요령 참조

❍ 사 업 비 : 3,224백만원(시설비 3,221, 시설부대비 3)

❍ 예산과목 : 생활주변 녹지확충, 녹지보전 강화, 가로수 생육환경 및 가로변 녹지량 확충, 시설비(401-01) /시설부대비(401-03)

※ 2016년 가로변 녹지량 확충사업 사고이월(2건)

- 대    상 : 중구 세종대로, 중랑구 신내역로 등 2개소

- 내    용 : 교통섬 녹지 개선, 고가아래 녹지 조성 등

- 이 월 비 : 302백만원(중구 132, 중랑구 170)

□ 추진일정

❍ 2017. 1.      : 사업계획 수립 및 시달, 도면작성비 사전 재배정

❍ 2017. 2.~ 6. : 설계심의, 공사비 등 재배정

❍ 2017. 4.~11. : 공사시행

5		행정사항

❍ 자체설계에 따른 도면작성비 사전 재배정 및 설계용역비 재배정

- 단순식재 및 시설물 설치 공종에 해당되는 경우 유사사례를 참고하여 자체설계 시행 [관련근거 : 행정2부시장 방침 제10058호(2011.7.8.)]에 따른 도면작성비 사전 재배정

- 사업내용이 복잡하여 불가피하게 실시설계용역 시행이 필요한 경우 ‘기술용역 타당성 심사결과’에 따라 설계용역비 재배정

❍ 설계심의(조경과) 및 공사비 등 재배정

- 시의회 소통결과 포함하여 설계심의 요구

- 일상감사 또는 계약(원가)심사 결과에 따라 공사비 재배정

❍ 공사 착·준공 후 5일 이내 보고 철저

- 준공보고 시 설계심의 결과의 조치사항을 준공사진에 포함 제출

❍ 지방재정법 개정(출납폐쇄 기간 단축)에 따라 늦어도 11월 중 완료

붙임 1. 2017년 대상지 및 가내시액 내역 1부.

2. 2017년 대상지 현황 1부.

3. 가로변 녹지량 확충사업 추진요령 1부.

4. 설계심의 요구서 1부.

5. 착공(준공) 보고서식 1부.

6. 공사비별 도면작성비 등 적용금액 1부.  끝.