“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	문화관광 특화거리 및 여행자 편의시설 조성공사 2차 변경 계약 의뢰

1. 관광정책과-651(2017.1.12.)호와 관련입니다.

2. 시행 중인 문화관광 특화거리 및 여행자 편의시설 조성공사의 설계변경을 아래와 같이 시행코자 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 문화관광 특화거리 및 여행자 편의시설 조성 공사

나. 공사기간 : ’16.12.15 ~ ’17. 2.28

다. 도 급 액 : 554,217,520원

라. 예산과목 : 관광사업과, 서울만의 특화관광자원을 활용한 서울관광 활성화,이용자 중심의 서울관광 정보 확산, 주요 거점별 종합관광정보센터 운영 활성화, 시설비
관광사업과, 서울만의 특화관광자원을 활용한 서울관광 활성화, 서울
강점 특화관광 콘텐츠 확충, 서울 매력명소 관광자원 개발 활용, 시설비

마. 설계변경내역

구 분	변 경 내 용
계약기간	당 초	16.12.15 ~ ’17. 2.28
	변경후	16.12.15 ~ ’17. 3.24

바. 설계변경사유

- 설연휴, 충분한 콘크리트 양생 기간 확보 등의 사유로 공사기간 연장

붙  임 : 1. 설계변경계획 방침 1부.
2. 합의각서 1부. 끝.

	관광정책과장
주무관	김보경		실무사무관	代권훈오		관광정책과장	01/13 김재용
협조자
시행	관광정책과-733	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	2133-2817	/전송	2133-1067	/	megbkkim@seoul.go.kr	/	부분공개(6)