자문 검토 의견서

○ 수도권(Ⅱ)광역상수도 용수공급신뢰성제고사업 제1공구

안 건	검 토 의 견
수도권(Ⅱ)광역상수도 용수공급신뢰성제고사업 제1공구	1. 각 작업구 상호간 공사 연관성이 있는지 공정표를 제시하고 연관성이 있을 경우 공정표상 더미로 표시하기 바람. 2. 관 갱생(보수․보강)공사의 관경을 표시하고, 작업구별 간격을 표시하고, 각 작업구의 크기가 각각 다른 것인지 표기하여 주기 바람. 3. 공정표상 #12 ~ #18작업구에서 동시다발적으로 공사가 진행되는 것으로 되어 있는바 작업구간 상관성이 적을 경우 각 작업구별로 집중 작업함으로써 공기 단축할 여지가 없는지 검토하여 주기 바람. 4. 관 갱생(보수․보강)공사에 필요한 적정 작업장 상세도를 제시하기 바람. ※ 동일 작업에 대하여 작업장의 폭과 길이가 5.0×36.2m~9.6×48.0m로 상이하므로 최소한도의 작업장 점유공간을 검토바람. 5. 작업구 #15지점 올림픽공원→올림픽로 합류시 안전칸막이를 축소하여 가속구간을 확보할 수 있도록 검토하기 바람. 6. 작업구 #17지점 2단계 공사시 작업장 점유 및 차로수 감소로 택시정류장의 혼잡 및 사고위험이 예상되므로 택시정류장을 후방으로 이전하는 등을 검토하여 주기 바람. 7. 작업구 #18지점 백제고분로 직진차량과 송파대로→백제고분로방향 우회전차량의 합류시 사고방지를 위해 석촌역사거리교차로 직진유도선 설치를 검토바람.

2017. 01. 17