성동소방서  신설

팀 장 : 마성제	☎ 02-452-0797
담당자 : 신종춘	☎ 02-452-0797

□ 사업부서 : 광진소방서 및 도시기반시설본부

- 재배정 부서 : 광진소방서 소방행정과

도시기반시설본부(건축부,설비부,방재시설부)

□ 사업개요

○ 근     거 : 2017년도 예산편성

○ 위     치 : 서울시 성동구 행당동 92-6

○ 규     모

- 대 지 : 2,970㎡(900평) / 지상 6층, 지하 1층 / 연면적 5,194㎡(1,574평)

○ 총사업비 : 금32,803,868천원

※ 2017년도 사업비 : 10,513,035천원

□ 추진현황 및 향후 계획

○ ‘07.12.27. : 제8차 소방력보강 5개년 기본계획(안) 수립

○ ‘11.01.13. : 제5대 성동구의회□성동소방서 건립유치 추진결의안□승인

○ ‘12.10.12. : 성동소방서 신설계획(서울시장방침제316호)

○ ‘13.01.22. : 성동소방서 건립 타당성 조사(적정)

○ ‘13.05.21. : 서울시 투자심사(적정)

○ ‘13.07.11. : 서울시 공유재산심의(적정)

○ ‘14.01.29. : 성동소방서 건축 기본계획 수립 및 도시기반시설본부 건축의뢰

○  ‘14.05.01 : 행당 도시개발계획(안) 고시

○ ‘14.06. ～ 09. : 설계용역 공고 및 작품접수, 계약

○  ‘14.06.26 : 성동소방서 신설 토지 매매계약(LH공사 ↔성동소방서)

○ ‘14.07. ～ ‘14. 10. : 현상설계 공모 및 작품심사

○ ‘14.12. ～ ‘15. 10. : 기본 및 실시설계(10개월)

○ ‘15.12.10. : 건축공사 계약(누비종합건설(주)외 1)

○ ‘15.12.21. : 감리용역 계약(펨코엔지니어링외 1)

○ ‘16.01.25. ~ ‘17.05.24. : 건축 착공 및 완공(16개월)

○ ‘17.06.    :  청사 인계인수

□ 예산배정계획

(단위 : 천원)

예산과목	소계	기배정액	배정요구액	배정잔액	산 출 내 역
소 계	10,513,035	0	10,513,035	0
사무관리비 (201-01)	60,000	0	60,000	0	본서 및 센터 내부표지판 신설(교체) 등 ※ 재배정부서 : 광진소방서
시설비 (401-01)	9,911,368	0	2,577,716	0	붙임 : 2017년 예산 재배정 요청 공문 참조 ※ 재배정부서 : 도기본 건축부
		0	2,410,352	0	붙임 : 2017년 예산 재배정 요청 공문 참조 ※ 재배정부서 : 도기본 설비부
		0	65,800	0	붙임 : 2017년 예산 재배정 요청 공문 참조 ※ 재배정부서 : 도기본 방재시설부
		0	4,857,500	0	토지매입비(최종) : 4,792,500천원 주방설비(기구) : 65,000천원 ※ 재배정부서 : 광진소방서
감리비 (401-02)	30,000	0	30,000	0	붙임 : 2017년 예산 재배정 요청 공문 참조 ※ 재배정부서 : 도기본 건축부
시설부대비 (401-03)	11,667	0	9,267	0	붙임 : 2017년 예산 재배정 요청 공문 참조 ※ 재배정부서 : 도기본 건축부
		0	2,400	0	붙임 : 2017년 예산 재배정 요청 공문 참조 ※ 재배정부서 : 도기본 설비부
자산취득비 (405-01)	500,000	0	500,000	0	사무용집기류 등 자산취득 ※ 재배정부서 : 광진소방서

※ 기배정액 반드시 작성, 공란없이 모두 기입

□ 배정사유

○ 2016년, 2017년 세출예산편성에 반영된 사업 : 성동소방서 신설

※ 도기본건축부-902(‘17.1.16)호 『2017년 예산 재배정 요청(성동소방서   신축공사)』

※ 市소방행정과-1128(‘16.1.13)호 『2017회계년도 소방안전특별회계 예산

조기집행 추진 철저』

□ 서울위키 등록 여부

○ ‘17년 위키 최근등록일 :

○ ‘16년 위키 최근수정일 :

□ 첨부 : 2017년 예산 재배정 요청 공문 사본 1부. 끝.