투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰[남부순환로(개봉1동 사거리) 평탄화 사업 전기공사]

1. 설비부-1277(2017.1.24.)호와 관련입니다.

2.『남부순환로(개봉1동 사거리) 평탄화 사업 전기공사』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기 의뢰 내용

구분	준 공 기 한		비 고
	당 초	변 경
(총차)	2016. 04. 14. ~ 2019. 03. 25.	변경없음	금액 변동 없음
(1차)	2016. 04. 14. ~ 2017. 02. 07.	2016. 04. 14. ~ 2017. 12. 31.

나. 귀책소재 및 연기사유

1) 연기에 따른 귀책소재 : 서울시 도시기반시설본부

2) 지체상금 부과여부 : 미부과

3) 연기사유 : 선행공종인 토목공사 공기 연장에 따른 준공기한 연장

붙임  1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기 검토보고 1부.

3. 준공기한 연기 합의각서(1차) 1부.  끝.

	설비부장
주무관	김현욱		환경설비과장	여인웅		설비부장	01/25 권오식
협조자	경리과장	최정수
시행	설비부-1324	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8618	/전송	02-3708-8659	/	hyunkim@seoul.go.kr	/	대시민공개