투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	서울주택도시공사 사장(택지조성부장)
(경유)
제목	교통안전표지 원인자부담공사 변경승인 통보 (세곡2지구 6,8단지아파트 진입도로 및 밤고개로 확장공사)

1. 서울주택도시공사 택지조성부-498호(2017.01.26.)와 관련입니다.

2. 우리사업소 관내에서 시행하는「세곡2지구 6,8단지아파트 진입도로 및 밤고개로 확장공사 교통안전표지 원인자부담공사」의 공사(승인)기간 변경요청에 대하여 아래와 같이 변경승인하오니 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 세곡2지구 6,8단지아파트 진입도로 및 밤고개로 확장공사

교통안전표지 원인자부담공사

나. 공사위치 : 강남구 율현동 342-3, 204, 밤고개로 일원

다. 공사(승인)기간 : 승인일 ~ 2017. 04. 28.

라. 원인자 현황

구 분	설 계	감 리	시 공	원 인 자
교통안전표지	㈜영호이앤씨	㈜영호이앤씨	㈜피너클	서울주택도시공사 (택지조성부)

마. 변경승인 사항 : 공사(승인)기간 변경

공사(승인)기간		변경 사유	비고
변경 전	변경 후
승인일 ~‘16.05.31	승인일 ~‘17.04.28	최종교통규제 및 도로개통일정을 반영한 공사기간 연장

끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	김동현		기전과장	01/31 정판식
협조자
시행	기전과-1513	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33(대치동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0362	/전송	02-2040-0365	/		/	대시민공개