하자제로 품질만족 불신제로 고객감동

	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	위례지구 기무부대 지장물 철거업무 협조요청에 대한 검토보고

1. 관련 근거

〇 용지보상부-3002호(‘16.12.16.) : 위례지구 기무사부대 지장물철거에 따른 업무협조 요청

2. 위례지구내 건축물 철거와 관련하여 업무분장에 따른 담당부서인 용지보상부에서 기무부대의 건축물 철거를 우리 부에 요청함에 따라 다음과 같이 검토결과를 보고합니다.

〇 현황

- 택지개발사업에 따른 지장물 철거업무는 보상부에서 시행하고 있으나, 위례지구는 건축물 대부분이 콘크리트 구조물의 군시설(특전사, 기무부대)이고 임대주택 8만호 공급계획에 따른 조기착공 필요 등으로 특전사 건축물 철거는 위례사업부에서 일괄 시행중에 있음[택지사업본부장방침 제63호(‘16.02.17.)]

- 용지보상부에서 기무부대 건축물의 긴급한 철거 및 철거업무 효율성 등을 감안하여 특전사 건축물 철거와 동일하게 위례사업부에서 기무부대 건축물 철거를 시행하여 줄 것을 요청함

〇 검토의견

- 특전사 건축물 철거를 위한 국방부 및 특전사, LH 등 관계기관 협의업무가 과중하고 군부대의 일방적인 공사중지 및 현장출입 금지 등 공사추진에 어려움이 있으나, 건축물 철거주체를 단일화하여 공사를 진행함으로써 효율적인 철거업무를 시행중에 있음

- 또한 기무부대와 건축물 철거, 양여재산 관리대책 등에 대해 지속적으로 위례사업부에서 업무협의를 추진하였고 철거업무 일원화로 전체적인 공기단축으로 위례서로를 포함한 기반시설 조기개설 등이 가능한 바, 기무부대 건축물 철거업무를 위례사업부에서 일괄 시행하는 것이 타당할 것으로 판단됨

〇 향후계획

- 용지보상부에 상기 검토내용을 통보하고 석면조사 및 철거공사의 원가계산서 작성 등을 요청하여 위례사업부에서 기무부대 건축물 철거 일괄 시행

끝.

부 원						위례사업부장				마곡위례사업단장			택지사업본부장 직무대행		12/23
		장상옥						김영배			이광윤			김소겸
협조자	부 원		이경수

시행			위례사업부-3176				(2016.12.23)			접수				()
방침번호			본부장직무대행 방침 제772호
우	135-988			경기도 성남시 수정구 헌릉로 879								/
전화		031-786-6477			전송	031-786-6479		/	cso1607@i-sh.co.kr					/	공개