부  의  안

1. 제안부서 : 건설안전사업본부 건설사업처 건축공사부

2. 제안근거 : 설계변경심사위원회 운영기준(2016.02.01.) 가. 운영절차/4-1설계변경심사위원회/가. 심사·의결대상/(라)소요자재의 수급방법 결정

3. 제안사유 :

￮ 오금지구 합성수지 그릴창과 관련, 조달청 나라장터 업체 등록수 미달로 지급자재 발주 불가하여 사급전환 및 단가의 적정성, 협의낙찰률 사전심사

4. 심사․의결 요구사항 :

￮ 지급자재 사급전환 및 단가의 적정성

￮ 단가적용기준

- 신규비목에 대한 적용낙찰율 : 협의낙찰률 87.5%

※ 공사계약일반조건 제7절.1.나. 계약상대자의 책임없는 사유로 인한 설계변경시 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 그 단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 한다.

5. 참고사항 : 별첨자료 참조

2016년   12월    일

제 안 자  건축4급   임 승 룡   □

설계변경심사위원회 소집통보

수  신 : 건설안전사업본부장, 건축설계처장, 건축기술부장원, 계약심사(TF)부장, 건축설계부장, 건설사업부장, 재정관리부장, 예산자금부장

다음과 같이 위원회 소집을 통보합니다.

1. 일 시 : 2016.12.28. (수)

2. 장 소 : 해당부서(서면결의)

3. 의 안

제 안 번 호	제 안 제 목	제 안 내 용	제 안 부 서
제2016-03호(건축)	오금지구 합성수지그릴창 사급전환	사급전환, 단가의 적정성 및 협의낙찰률 적정성 심사	건설안전사업본부 건설사업처 건축공사부

4. 세부내용 : “별첨”

2016년   12월    일

위원장 건설안전사업본부장   장 달 수   □

설계변경심사위원회 서면 결의서

의  제 : 오금지구 합성수지그릴창 사급전환

구 분	성 명	찬 성	반 대	비 고
위 원 장 부위원장 위 원 위 원 위 원 위 원 위 원 위 원	장 달 수 이 우 필 조 대 원 곽 홍 준 안 병 기 정 성 호 장 한 수 조 한 보

1. 제안부서 : 건설안전사업본부 건설사업처 건축공사부

2. 제안근거 : 설계변경심사위원회 운영기준(2016.02.01.) 가. 운영절차/4-1설계변경심사위원회/가. 심사·의결대상/(라)소요자재의 수급방법 결정

3. 제안사유 : 나라장터 업체 등록수 미달로 인한 지급자재 발주 불가에 따른 합성수지그릴창 사급전환 (중소기업청 직접구매 예외 인정)

4. 심사․의결사항 : 지급자재 사급전환, 단가 및 협의낙찰률 적정성

2016년   12월    일

위원장 건설안전사업본부장   장 달 수   □