				★ ◎									본부장직무대행 방침 제12호
문서번호	택지계획부-158			부 원			파트장			택지계획부장			택지계획처장			택지사업본부장 직무대행
보존기간	1년																01/09
				김주연			고재영			최칠문			김소겸			김소겸
결재일자	2017.01.09
공개여부	비공개(7)			협조
일상감사	대상아님
보조제목을 입력하는곳 입니다
상암2지구 대로1-73호 차로확장 추진방안 검토
		서울주택도시공사
(택지사업본부 택지계획부)

상암2지구 대로1-73호 차로확폭 추진방안 검토

상암2지구 택지개발사업과 관련하여 지구를 관통하는 대로1-73호(월드컵북로) 확장에 대한 주민수렴 결과를 반영하여 차로 확폭을 추진하고자 함.

▢ 사업개요

○ 위    치 : 서울시 마포구 상암동 일원

○ 면    적 : 341,811.7㎡(1공구 : 259,321.8㎡, 2공구 : 82,489.9㎡)

○ 세 대 수 : 2,865호(임대:1,910호, 분양:955호)

○ 사업기간 : 1공구 2009.12.03 ~ 2012.12.31, 2공구 2009.12.03 ~ 2018.06.30

▢ 추진경위

○ 2004.12.03 : 지구지정(건교부고시 제2004-365호)

○ 2005.09.05 : 지구지정변경 및 개발계획 승인(건교부고시 제2005-274호)

○ 2005.12.29 : 지구지정변경, 개발계획변경 및 실시계획 승인(건교부고시 제2005-479호)

○ 2006.08.30 : 개발계획변경 및 실시계획변경 승인(건교부고시 제2006-343호)

○ 2007.04.06 : 지구지정변경 및 개발계획변경, 실시계획변경 승인(건교부고시 제2007-111호)

○ 2008.12.23 : 개발계획변경 및 실시계획변경 승인(국토부고시 제2008-772호)

○ 2009.12.28 : 개발계획변경 및 실시계획변경 승인(국토부고시 제2009-1226호)

○ 2010.12.21 : 개발계획변경 및 실시계획변경 승인(국토부고시 제2010-969호)

○ 2011.10.10 : 개발계획변경 및 실시계획변경 승인(국토부고시 제2011-554호)

○ 2012.05.25 : 개발계획변경 및 실시계획변경 승인(국토부고시 제2012-259호)

○ 2012.12.10 : 지구지정변경 및 개발계획변경, 실시계획변경 승인(국토부고시 제2012-863호)

○ 2012.12.31 : 1공구 사업준공(국토부공고 제2013-40호)

○ 2013.12.20 : 개발계획변경 및 실시계획변경 승인(국토부고시 제2013-821호)

○ 2014.12.19 : 개발계획변경 및 실시계획변경 승인(국토부고시 제2014-935호)

○ 2015.12.30 : 개발계획변경 및 실시계획변경 승인(국토부고시 제2015-1043호)

○ 2016.01.02 : 개발계획변경 및 실시계획변경 승인(국토부고시 제2015-1083호)

▢ 차로확폭 검토

○ 추진배경

- 교통영향평가 심의 결과(통과교통 방지를 위한 도로위계 조정)를 반영하여 대로 1-73호선 일부구간 차로 폭원 축소(왕복 6→2차로)하여 시공완료 하였으나, - 입주 후 해당구간 확폭 민원이 지속적으로 발생함에 따라 서울시장과 정재호국회의원 면담 결과 차로 확폭에 대한 주민의견 수렴을 통하여 도로 확폭 여부 결정 지시 - 마포구에 의뢰하여 시행한 주민의견 수렴 결과 상암2지구 입주민의 74%가 확폭에 찬성함에 따라 해당구간 확폭 추진	제2자유로 확장요청 구간 (대로1-73)

○ 추진경위

- 2005.12    : 교통영향평가 심의

• 통과교통이 방지되도록 도로위계를 낮추는 방안(왕복2차로) 검토

- 2016.07.01. : 서울시장과 정재호국회의원 면담

•  지역 여론을 수렴하여 주민 반대가 없으면 빠른 시일 내에 추진

- 2016.07.22. : 도로확장 관련 협조요청(SH→마포구)

• 도로확폭 여부 결정을 위한 해당지역 주민의견과 마포구의 의견(시행 주체 및 추진절차, 요청사항 등) 조회

- 2016.09.30. : 도로확장 관련 주민설문조사 결과 통보(마포구→SH)

• 지역주민 및 도로이용자 모두 해당도로의 상습정체에 대하여 문제를 인식하고 있음에 따라 주민의견을 적극 반영하여 사업 추진 요망

․마포구 조사결과 : 전체 374명 중 찬성 278명(74%), 반대 96명(26%)

․고양시 조사결과 : 전체 621명 중 찬성 542명(87%), 반대 79명(13%)

․그 외 지자체    : 전체 162명 중 찬성 144명(89%), 반대 18명(11%)

▢ 추진방안

○ 검토내용

- 상암2택지개발사업 시행자인 우리공사가 차로 확폭을 추진할 경우 교통영향평가 심의시 검토되어 수용한 사항의 환원으로 사업추진 어려움이 예상되고, 용역발주 절차부터 이행함으로써 장기간 소요됨에 따라 도로 관리청인 마포구와 서부도로사업소와 협의하였으나,

- 사업시행자가 차로 확폭하여 시도로 결정후 인계하는 것으로 회신받음에 따라 우리공사에서 교통영향평가 변경심의를 통하여 대로1-73호선의 차로 확폭 결정하고 설계 및 시공 추진

○ 추진경위

- 2016.10.05 : 도로확장 관련 회의(SH공사, 마포구토목과)

• SH공사 : 2공구 준공 후 관리청인 마포구에서 추진하는 경우 차로 및 중앙분리대 일부를 조정하여 차로를 확장함에 따라 도리관리계획 변경 절차 이행 불필요, 마포구 시행 요청

• 마포구 : 해당도로는 대로에 해당하는 시도로서 서울주택도시공사에서 시도로 결정 후 도로사업소 등에서 공사 시행

- 2016.10.24 : 대로1-73호 차로확장 관련 협조요청(SH→마포구, 서부도로사업소)

• 도로 확장에 대한 비용은 SH공사에서 부담하고,‘선 준공 후 관리청에서 도로확장공사를 시행하는 방안’제안

- 2016.10.24 : 대로1-73호 차로확장 관련 검토의견 송부(서부도로사업소→SH)

•	사업소에서는 서울특별시 도로로 인정고시가 되고, 인수·인계가 완료된 후 도로 및 도로부속시설물에 대한 유지관리 시행, 서울특별시 도로로 인정고시가 안 된 도로의 차로확장에 대한 시행은 불가함

▢ 조치계획

○ 교통영향평가 변경심의 추진

- 교통영향평가 용역 발주 끝.

붙임표시