함께 키우는 중소기업, 함께 여는 서울의 미래
	서울산업진흥원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	“SETEC 등 시설물종합위탁관리용역” 설계변경(기간연장)

1.「판로지원팀(서울파트너스하우스) 시설물 관리 용역 연장 요청(판로지원팀-72, 2017.1.16) 및「서울애니메이션센터/만화문화공간 “시설물종합위탁관리용역” 계약기간 연장 요청」(애니타운팀-91, 2017.1.23)과 관련입니다.

2. 상기와 관련하여 다음과 같이 설계변경(기간연장)을 실시하고자 합니다.

가. 계약현황

계 약 명	계약업체	계약기간	시 설 명	계약금액 (천원)	인원 (명)	연장 대상
SETEC 등 시설물종합 위탁관리용역	에이비엠㈜ (대표자 : 김윤태)	2015. 3. 1 ~ 2017.2.28 (24개월)	소 계	4,594,620	61
			SETEC(컨벤션 포함)	2,667,107	37	×
			애니센터(재미랑 포함)	1,584,608	20	○
			파트너스하우스	342,905	4	○

나. 변경사유

시설명	계약기간			사 유 (사업부서 요청)
	당 초	변 경	증감
SETEC (컨벤션 포함)	2015. 3. 1 ~ 2017.2.28(24개월)	2015. 3. 1 ~ 2017.2.28(24개월)	-	후속 관리업체 선정을 위한 입찰공고 진행중
애니센터 (재미랑 포함)	2015. 3. 1 ~ 2017.2.28(24개월)	2015. 3. 1 ~ 2017.10.31(32개월)	증)8개월	재건축 설계용역완료시까지 임시연장
파트너스 하우스	2015. 3. 1 ~ 2017.2.28(24개월)	2015. 3. 1 ~ 2017.3.31(25개월)	증)1개월	서울시와의 위•수탁협약서 종료시까지 임시연장

※ ① 향후 애니센터 철거시점 확정추이에 따라 계약기간 등이 다소 변경될 수 있음.

② 재미랑 5호 운영개시에 따른 청소인력은 별도 충원을 실시하지 않고, 기존 “애니센터 및   재미랑” 청소인력 재배치를 통해 활용하되 필요시 주말근무 등의 추가 근무시간 인정

다. 변경금액

(단위 : 원)

시 설 명	계약변경			산출근거
	당 초	변 경	증 감
소 계	4,594,620,620	5,174,851,350	580,230,730
SETEC (컨벤션 포함)	2,667,107,498	2,667,107,498	-
애니센터 (재미랑 포함)	1,584,608,034	2,150,300,642	565,692,608	70,711,576원/월×8월
파트너스 하우스	342,905,088	357,443,210	14,538,122	14,538,122원/월×1월

라. 예산과목

- 애니센터(재미랑 포함) : 2017, <고유>애니타운조성및운영,     지급수수료

- 파트너스하우스 : 2017, <수탁>서울파트너스하우스운영, 지급수수료

붙임 : 1. 계약서 1부

2. 신문기사(서울애니메이션센터 재건축) 1부

3. 판로지원팀(서울파트너스하우스) 시설물 관리 용역 연장 요청 1부

4. 애니센터/만화문화공간 “시설물종합위탁관리용역” 계약기간 연장 요청 1부. 끝.

★담당			팀장			단장			대표이사	01/25
협조자	팀장			팀장			팀장
예산기획			검사역
시행	운영지원팀-79	(	2017.01.25.	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 마포구 월드컵북로 400	/	홈페이지 http://www.sba.seoul.kr
전화	02)2222-4231	/전송	02)000-0000	/	이메일 pilkyu@sba.seoul.kr	/	공개