한양도성 인왕산 정상부

성벽 붕괴구간 보수방안 마련 중간보고

한양도성 인왕산 정상부 성벽 붕괴구간  ‘발굴·원인규명 및 성벽 보수설계’ 와 관련하여 문화재청 사적분과위원 자문사항을 반영한 보수방안 마련 중간보고 내용임

1) 붕괴개요

○ 일   시 : 2016.3.7.(월) 00:20

○ 위   치 : 인왕산 정상 (기차바위 맞은편) 하부

○ 규   모 : 폭 6.7m, 높이 3.7m 체성과 여장 일부

성벽외측 체성 (성벽 몸체부분)	성벽내측 여장 (성벽 위에 설치하는 낮은 담장)

○ 원    인 : 해빙기 집중강우(45mm)로 내부 토압상승 및 과거 군초소 및 여장복원 하중 등이 복합적으로 작용한 것으로 추정

- 풍화·배부름 등 성벽 변형이 관측되어, `14.12월부터 탐방로를 폐쇄한 구간임

2) 추진경위

○ `16.3.7 전문가 현장자문(1차) : 송인호, 권기혁, 박기화, 손영식

- 보수 범위 : 약30m, 지반조사 후 지반보강 판단

- 상부 여장 하중이 직접적으로 작용하지 않도록 보수

○ `16.3.9  문화재청(수리기술과) 합동 보수방안 현장 협의

- 상부 여장제거, 변형진행성 판단 수 해체보수 최소화 방안도 검토 필요

- 붕괴우려 인접부위 해체시 성돌의 재활용은 어려워 보임

○ `16.5.13  전문가 현장자문(2차) : 송인호, 권기혁, 심정보, 이찬희

- 상부 여장 11타(약40m) 우선 제거하고 우장막 설치

- 발굴, 원인규명 조사 용역 필요

○ `16.6.17 추가붕괴 우려구간 여장 11타 제거

○ `16.9월 : 성벽 붕괴구간 발굴·원인규명 및 보수설계 용역착수(`17.7월까지)

- 수행기관 : 한강문화재연구원(발굴)+원인규명(시립대)+볕터건축사사무소(보수설계)

○ `16.11.17 : 붕괴구간 발굴결과 문화재청 전문가 자문(3차) : 백종오

- 축조기법 확인 및 자문의견 반영 추가발굴 완료

○ `16.12.21 : 보수방안 문화재청 전문가 자문(4차) : 심정보, 백종오

- 제거한 여장 11타는 숙종시기 형태로 복원

- 여장복원을 위해 40m 원형성벽 해체 후 새롭게 석재를 가공할 수 밖에 없는 상황임

주요 쟁점(자문)사항 : 여장복원 여부

⇒

보수 전

보수 후

2011년 백악구간 보수 사례

3) 구체적인 계획안 : 발표자료 참조