『구민과 소통하는, 희망광진!』
		광진구보건소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	자양 공공힐링센터 신축공사 설계변경에 따른 시공 요청

1. 구청장방침 제1173호(2016.11.17.), 디지털정보과-6664(2016.11.11), 건축과-35827(2016.11.14)호 관련입니다.

2. 자양공공힐링센터 신축공사 설계변경 요청과 관련하여 아래와 같이 소요예산을 확보하고 알려드리오니 공사에 반영하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 예산범위 내에서 이용자의 편의성 향상(품질 및 안전 포함)을 검토하여 반영하여 주시기 바라며, 공사장 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

□ 주요 변경 및 설계누락 내용

- 1층 교육실 : 바닥 마감재(렉스코트), 상담실 면적

- 2층 명상관 : 내벽 흡음공사, 출입문 변경

- 주  차  장 : 휀스 및 차량 차단시설

- 누락물량 등 정산 : 오수배출시설, 자가정보통신망, 소음차단용 가설울타리 등

붙임  1. 자양공공힐링센터 신축공사에 따른 내용변경 및 소요예산 현황보고 1부.

2. 자양 공공힐링센터 자가통신망 공사 산출 내역 1부.

3. 설계변경 및 누락에 따른 소요예산 내역 1부.  끝.

	광진구보건소장
수신자	광진구청장(건축과장),광진구청장(디지털정보과장)
주무관	한기옥		힐링센터팀장	김진호		보건지소장	송진이		보건소장	02/08 이희영
협조자
시행	보건지소-1092	(		)	접수		(		)
우	05075	서울특별시 광진구 동일로18길 80	/	http://www.gwangjin.go.kr/
전화	02-450-7012	/전송	02-	/		/	부분공개
“찾기 쉽고 편리한 도로명주소, 길찾기가 즐거워집니다”