문서번호	도로시설과-1764
결재일자	2017.2.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	전용도로팀장	도로시설과장	안전총괄관
박용화	이앙식	김길남	02/09 이진용

2017 자동차전용도로(토공구간)

노후 포장도로 정비공사 추진계획

2017. 02

안전총괄본부

(도로시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	서울시설 관리공단
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2017년도 자동차전용도로(토공구간)

노후 포장도로 정비공사 추진 계획 보고

2017년도 자동차전용도로 노후포장(토공) 정비대상 구간에 대하여 현장 확인을 통한 적정성 여부 검토결과에 따라 정비계획을 수립․시행하여 자동차전용도로 포장 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 자동차전용도로 포장 유지관리 현황

○ 관리노선 : 올림픽대로 등 11개 노선

○ 규    모 : 연장 165.02km, 관리면적 61,163a

- 토공구간 : 10개 노선, 연장 101.91km, 포장면적 43,409a

○ 연도별 포장도로 정비현황(토공구간)

구 분	계	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13	‘14	‘15	‘16
정비면적(a)	16,714	2,749	3,793	2,111	635	1,513	1,056	2,422	2,435
정비율(%)	37.25	6.09	8.41	4.68	1.41	3.35	2.34	5.37	5.6
예산(백만원)	42,862	5,347	7,000	5,133	3,000	4,300	4,300	7,300	6,482

□ 2017년 사업개요

○ 규    모 : 6개 노선 42개소(2,597a), 소파보수(100a)

구 분	총 계	강변북로	올림픽대로	북부간선	동부간선	동부간선B	우면산로	비고
개 소	42	18	8	4	7	2	3	-
면적(a)	2,697	1,071	641	189	413	249	34	100

○ 공사기간 : 2017.02.~11.

○ 소요예산 : 7,000백만원

○ 시행방법 : 서울시설공단 민간대행 사업으로 시행

※ 2016년 정비 실적 : 8개 노선 55개소(2,270a), 소파보수(85a)

구 분	총 계	강변북로	올림픽대로	동부간선	경부고속	언주로	양재대로	서부간선	내부순환	비고
개 소	58	8	20	6	7	1	1	14	1	소파보수 85a
면적(a)	2,435	434	823	180	489	46	120	316	27

□ 추진 경위

○ 2016.12 ~ 2017.01 : 11개 노선 현장조사 실시(공단)

○ 2017.01.24. : 포장 정비대상 구간 선정보고(공단→서울시)

○ 2017.01.31.~02.02. : 대상구간 검토 및 합동 현장조사(서울시·공단)

○ 2017.02.02.~02.06. : 조정구간 추가 현장조사(공단)

□ 정비대상 구간 검토

○ 선정 기준(공단)

- SPI지수 6이하 구간 중 현장조사 결과 포장상태 불량 구간

- 종·횡방향 균열 발생 상태 및 소성변형 등 포장 노후구간

- 평탄성 불량 구간, 체수구간, 램프, 접속구간 등 취약구간

○ 선정 방법

정량적 분석	⟹	현장실사	⟹	우선순위 결정	⟹	구간선정	⟹	보수방법 결정
SPI 6이하 구간 List Up		포트홀 및 균열 발생 현장조사		민원발생 및 노후진행 구간		42개구간		코아채취로 포장두께 검토

○ 합동 현장조사 확인사항

- SPI지수 6이하 구간의 포장노후 상태

- 포장균열, 소성변형 상태, 차량 주행성 점검

- 아스팔트 포장면 골재 부착상태 확인

- 장기적 도로계획(확장 등) 및 인접구간 정비상태 확인

□ 조치계획

○ 대상구간 조정 시행

- 공단 조사구간 중 포장상태가 양호한 구간은 물량 감소 조정 : 3개소

- 현장확인 결과 망상균열 및 소성변형이 심각한 구간 추가 선정 : 4개소

- 노선별 검토결과

노선명	공단조사 결과 (당초)		합동 확인결과 (변경)		변경내용
					총계		물량 증가		물량 감소
	개소	면적(a)	개소	면적(a)	개소	면적(a)	개소	면적(a)	개소	면적(a)
6개 노선	42	2,597	45	2,591	3	92	4	270	3	-276
강변북로	18	1,071	19	1,059	1	-12	2	36	1	-48
올림픽대로	8	641	10	745	1	104	2	234	1	-130
북부간선	4	189	4	189	-	-	-	-	-	-
동부간선	7	413	7	413	-	-	-	-	-	-
동부간선B	2	249	2	151	1	- 98	-	-	1	-98
우면산로	3	34	3	34	-	-	-	-	-	-

○ 예산배정 계획

- 포트홀 발생 방지를 위하여 우기 전 노후개량 포장공사의 조속한 사업 추진을 고려하여 예산 일괄 배정 조치

□  향후계획

○ 2017.01.~02. : 예산 배정, 계약심사 및 발주

○ 2017.03. : 공사계약 및 착공

○ 2017.04.~06. : 우기대비 소파 발생 예상 구간 우선 정비시행

○ 2017.11. : 공사 완료 및 결과보고

첨 부 : 1) 2017년도 자동차전용도로 노후포장 정비구간 검토 1부.

2) 현장조사서 1부.

3) 위치도(전체) 1부.  끝.