“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	남산 예장자락 재생사업 문화재 정밀발굴조사 용역 계약변경 의뢰

1. 공공재생과-157(2017. 1. 4.)호와 관련입니다.

2.「남산 예장자락 재생사업 문화재 정밀발굴조사」 용역을 아래와 같이 계약변경 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 「남산 예장자락 재생사업 문화재 정밀발굴조사」

나. 용역변경 내용

구 분	당 초	변 경	비고
용역기간	2016.12.30.~2017.3.13	2016.12.30.~2017.4.30

다. 용역변경 사유

- 동토 및 토양결빙 등 동절기 용역진행의 어려움으로 용역을 중지하고 이에 따른 기간만큼 준공기한 연기

라. 용역업체 :(재)기호문화재연구원(대표 : 고수길)

마. 예산과목 : 공공재생 계획수립, 공공개발 및 공공공간 확충, 남산 예장자락 재생사업, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 관련문서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부. 끝.

	공공재생과장
주무관	김방용		특화공간조성팀장	안중욱		공공재생과장	02/14 홍선기
협조자
시행	공공재생과-1632	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 12층	/
전화	02)2133-1558	/전송	02)2133-1016	/	wlsqnfud@seoul.go.kr	/	대시민공개