투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(가동보 설치 관련 설계변경 실정보고)

▢ 업무지시현장 :  잠원2 빗물펌프장 신설공사 주식회사 범한엔지니어링 종합건축사 사무소, 잠원2 빗물펌프장 신설공사 (주)신명건설기술공사, 잠원2 빗물펌프장 신설공사 주식회사 한국건설관리공사

▢ 작 성 일 자 : 2017-02-17 12:02:29

▢ 지 시 내 용 :

1. 잠원2감 2017-35호(2017.02.13.)와 관련입니다

2. 잠원2빗물펌프장 신설공사 가동보 제작 및 설치와 관련하여 강남구청 요구사항에 대한 책임건설사업관리기술자의 검토의견이 적정하다고 판단되므로

3. 공기압축기로부터 가동보까지 압축성 유체(공기)의 330m 길이 배관으로 압력 전달 등 변경 사항 전반에 대한 관련분야 전문가(유체기술사 등) 검토를 받고 설계변경 실정보고하시기 바랍니다

※ 가동보 설치 일정이 촉박함을 감안하여 조속히 검토보고 바람. 끝.

주무관							추한영			열빛총괄과장					02/17 유병기
협조자				주무관						곽용길
시행			설비부-2567									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8610						/전송			02-3708-8659					/	cc2436@seoul.go.kr												/	대시민공개