				★ ◎									본부장 방침 제55호
문서번호	전기공사부-592			부 원			전기공사부장			첨단기술사업처장			건설안전사업본부장
보존기간	3년														02/17
				이치균			신명범			이원풍			장달수
결재일자	2017.02.17
공개여부	공개			협조	파트장				박귀서
일상감사	대상아님
성동교정시설 신축 전기공사
안전관리자 선임 용역기간 연장 검토 보고
		서울주택도시공사
(전기공사부)

전기설비 안전관리자 선임용역기간 연장 검토 보고

(성동교정시설 신축 전기공사)

법무부와 국유재산법 제54조 교환방식으로 추진중인『성동교정시설 신축 전기공사』공사기간 연장으로『전기사업법』제73조에 따른 전기설비 안전관리자 선임기간을 아래와 같이 변경 검토 보고합니다.

Ⅰ		관 련 근 거

- 전기공사부-3369호(2016.08.30.)

“문정법무시설 전기설비 안전관리자 선임방안 보고”

- 계약부-13766호(2016.09.02.)

“계약체결 통보(문정법무시설 신축 전기안전관리자 위탁용역)”

- 건설사업부-9036호(2016.12.06.)

“문정법무시설 신축공사 준공기한 연장 검토 보고”

구 분	당 초	변 경	비 고
비상대기소	2016.12.07.	2017.01.15.	증) 39일
구 치 소, 보호관찰소		2017.02.27.	증) 82일

Ⅱ		용역계약 현황

(단위 : 원)

계 약 명	계 약 자	계 약 금 액	용 역 기 간	비 고
성동교정시설(구치소) 신축 전기안전관리자 위탁용역	두온자산관리	18,287,500	2016.09.01 ~ 2017.02.28
성동교정시설(비상대기소,보호관찰소) 신축 전기안전관리자 위탁용역	삼삼전기관리공사	12,122,000	2016.09.01 ~ 2017.02.28

Ⅲ		용역기간 변경 사유

▢ 전기안전관리자 선임기간 연장사유

- 선행공종(건축)의 공사기간 연장으로 전기사업법 제73조“전기안전관리자의 선임 등”및 동법 시행규칙 제40조 ③항에 의거 전기설비의 설치장소의 사업장에 상시근무를 하여야 함에 따른 성동교정시설 전기안전관리자 선임 용역기간 연장.

Ⅳ		용역기간 변경 현황

▢ 용역기간 변경 사항

계 약 명	당 초	변 경	증 감
성동교정시설(구치소) 신축 전기안전관리자 위탁용역	2016.09.01. ~ 2017.02.28	2016.09.01. ~ 2017.05.31	증) 3개월
성동교정시설(비상대기소,보호관찰소) 신축 전기안전관리자 위탁용역	2016.09.01. ~ 2017.02.28	2016.09.01. ~ 2017.03.31. (비상대기소)	증) 1개월
		2016.09.01. ~ 2017.05.31. (보호관찰소)	증) 3개월

▢ 용역비 변경 사항

(단위 : 원)

계 약 명	당 초	변 경	증 감
성동교정시설(구치소) 신축 전기안전관리자 위탁용역	18,287,500	29,260,000	증) 10,972,500
성동교정시설(비상대기소,보호관찰소) 신축 전기안전관리자 위탁용역	12,122,000	15,006,200	증) 2,884,200

Ⅴ		검토의견 및 행정사항

▢ 검토의견

- 성동교정교정시설 선행공종(건축) 공기연장에 따른 순연 및 법무부 인수        시점을 감안하여 용역기간을 조정함이 타당하고

- 법무부 인수인계시기에 따라서 계약기간 및 계약금액 증감 정산 예정.

▢ 행정사항

- 계약부서에 안전관리자 선임 용역 계약 변경 요청

- 용역계약업체로 하여금 한국전기기술인협회에 전기안전관리자 선임 변경신고 지시.

붙임  1. 문정법무시설 신축공사 준공기한 연기 검토 보고

2. 문정법무시설 전기설비 안전관리자 선임방안 보고

3. 계약체결 통보(문정법무시설 신축 전기안전관리자 위탁용역)

4. 설계변경 전,후 내역서(전기안전관리자 선임용역) 구치소

5. 설계변경 전,후 내역서(전기안전관리자 선임용역) 비상대기소, 보호관찰소.  끝.