				★ ◎										본부장 방침 제56호
문서번호	재난안전부-408			부 원			재난안전부장				안전하자관리실장			건설안전사업본부장
보존기간	10년													전결			02/17
				권오종			나재하				이우필			장달수
결재일자	2017.02.17
공개여부	공개			협조	파트장			박보순
일상감사	대상아님
보조제목을 입력하는곳 입니다
2017년도 풍수해대비 건설공사장 일제점검·정비계획 보고
		서울주택도시공사
( 건설안전사업본부 재난안전부)

2017년도 풍수해대비 건설공사장 일제점검·정비계획 보고

2017년 풍수해대비 우리공사 건설공사장에 대한 사전 일제점검을 시행하고 적출사항에 대한 보완·개선을 통해 풍수해대비에 철저를 기하여, 시민의 생명보호와 재산피해 최소화 및 안전한 공사환경조성에 기여코자함.

추진배경

□ 2017년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 시행

- 2017년 수해안전대책관련 수방시설 및 수해취약지역 일제점검·정비계획,        하천관리과-2107호(2017.02.08.)

점검대상(총 42개 현장)

유형	현장명	착공	준공	비고
택지 (7개)	문정 컬쳐밸리 조성공사	2016.03.	2018.01.
	마곡구역 도시개발사업 단지조성공사(2공구)	2010.02.	2017.06.
	내곡 보금자리주택지구 단지조성공사	2011.11.	2017.07.
	세곡2 보금자리주택지구 단지조성공사	2011.11.	2017.06.
	오금 공공주택지구 단지조성공사	2013.12.	2017.07.
	항동 공공주택지구 단지조성공사	2015.10.	2018.11.
	위례지구 택지개발사업 단지조성공사(3공구)	2015.12.	2019.07.
주택 /건축 (24개)	천왕2 도시형생활주택 건설공사(1)(2)단지	2014.09.	2017.06
	가양동1457-1도시형생활주택	2016.10.	2017.10.
	고척동156장기전세	2016.01.	2017.12.
	신내도시형생활주택(3),(4)단지	2015.10.	2017.05.
	항동 도시형생활주택(1)~(3)단지	2016.09.	2018.12.
	항동2단지 아파트 건설공사	2016.09.	2019.01.
	항동3단지 아파트 건설공사	2016.05.	2018.08.
	항동4단지 아파트 건설공사	2016.09.	2018.12.
	항동8단지 아파트 건설공사	2016.03.	2018.06
	천왕8단지 도시형생활주택	2015.10.	2018.01.
	거여 12-1 장기전세주택	2016.03.	2017.08.

유형	현장명	착공	준공	비고
주택 /건축 (24개)	문정법무시설 신축공사	2014.08.	2017.02.
	오금보금자리주택지구 1단지 아파트건설공사	2015.01.	2017.09.
	오금보금자리주택지구 2단지 아파트건설공사	2015.06.	2018.04.
	신내640 행복주택건설공사	2016.07.	2019.04.
	돈의문 박물관 마을	2016.07.	2017.07.
	수요자맟춤형 주택(연극인전용)	2016.04.	2017.08.
	휘경동 두레주택	2016.07.	2017.03.
	은평구 산새마을 두레주택	2016.07.	2017.03.
조경 및 기타 (11개)	동남권유통단지 기반시설공사(탄천우안/서측도로)	2008.12.	2017.03.
	장지삼거리 입체화시설건설공사	2012.01.	2017.04.
	마곡2공구 도시개발사업 조경공사(1차)	2015.07.	2017.11.
	마곡2공구 도시개발사업 조경공사(2차)	2016.09.	2018.09.
	내곡 보금자리 주택지구 조경공사	2013.08.	2017.03.
	오금지구 조경공사	2016.09.	2018.01.
	은평 중심상업지 하천조성공사	2016.06.	2017.06.
	마곡중앙공원 조성공사	2015.11.	2018.06.
	마곡중앙광장 조성공사	2016.03.	2018.03.
	마곡구역 도시개발사업(3-1) 기반시설조성공사	2015.02.	2017.06.
	마곡구역 도시개발사업(3-2) 기반시설조성공사	2016.03.	2018.03.

- 2017년 신규착공 현장(24개소)은 착공 일정에 따라 「2017년도 건설공사장 현장점검 실시계획」에 따른 최초 점검시 풍수해 대비점검 병행 시행

추진계획

□ 풍수해대비 점검 및 정비기간 : 2017.02.20. ~ 2017.04.28.

점검계획수립 및 점검대상현장제출 (2.17.까지)	⇒	1차 점검 시행 (2.20.~3.24.)	⇒	지적사항 보완조치 (3.13.~3.31.)	⇒	조치결과 서울시제출 (4.07.까지)
재난안전부		외부전문가 안전점검팀 점검		건설공사 담당부서		재난안전부

⇒	2차 집중점검 시행(4.03.~4.14.)	⇒	2차지적사항 보완조치 (4.10.~4.28.)	⇒	조치결과 서울시 제출 (5.04.까지)
	외부전문가 안전점검팀 점검		건설공사 담당부서		재난안전부

점검계획 수립

□ 1차 점검 (2017.02.20.~ 03.24.)

점 검 자

- 반장 : 재난안전부 외부전문가 인력POOL위원중 선임

- 반원 : 재난안전부 외부전문가 인력POOL위원중 1~ 2명 선임

재난안전부직원 2명

※외부전문가 POOL위원중 상하수도, 수자원, 토목시공, 토질 및

기초 등 풍수해분야 전문가로 선임

※점검대상현장이 42개소임을 감안, 3개조로 편성 6일점검

주요점검내용

- 외곽유입수 및 단지내 표면수처리

․배수암거 및 집수정 시공상태, 날개벽 등

- 배수로 정비

․하천 및 하수관거내 퇴적물 등 유수장애물

․하천 및 하수관거 상류지역 수해유발 적치물 등

․관로 청소상태

․맨홀, 집수정, 뚜껑설치 및 안전보호망 설치

- 법면 정비상태

․다짐, 안식각, 보호블럭, 마대쌓기, 비닐 및 천막 덮기

- 지하구조물 침수예방정비상태 등

․공동구, 구조체 개구부

․터파기 부위 안전조치 상태

- 돌출시설

․대형입간판, 돌출간판, 철탑 및 각종 표지판 등

경미한 사항은 현장에서 즉시 정비조치

점검지적사항 및 조치결과는 건설공사담당부서에서 취합하여 재난안전부          에 제출

□ 2차 점검 (2017.04.05. ~04.15.)

점 검 자

- 반장 : 재난안전부 외부전문가 인력POOL위원중 선임

- 반원 : 재난안전부 외부전문가 인력POOL위원중 1~ 2명 선임

재난안전부직원 2명

※외부전문가 POOL위원중 상하수도, 수자원, 토목시공, 토질 및

기초 등 풍수해분야 전문가로 선임

※점검대상현장이 42개소임을 감안, 2개조로 편성 6일 점검

주요점검내용

- 1차 점검내용과 동일

- 기타 추가사항

1차점검시 미조치사항 및 조치예정 위주 집중점검

우기전 정비곤란 할 경우에는 별도의 정비대책 수립 후 시행

점검지적사항 및 조치사항, 별도대책수립시 건설공사담당부서에서 취합하여 재난안전부에 제출

향후계획

□ 2017.02.17. : 점검계획수립 및 점검대상현황제출

□ 2017.02.20.~ 03.24. : 1차 외부전문가 안전점검

□ 2017.04.07. : 점검사항 조치결과 서울시 하천관리과 제출

□ 2017.04.03.~ 04.14.  : 2차 외부전문가 안전점검

□ 2017.05.04. : 점검사항 조치결과 서울시 하천관리과 제출.

□ 2017.05.10. : 2017년 풍수해대비 수방계획수립

□ 2017.05.15. ~ 10.15. : 풍수해대비 수방대책본부 운영.

붙임  1. 2017년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 시행

2. 2017년 수해안전대책 관련수방시설 및 수해취약지역 일제점검·정비계획

3. (붙임 1) 점검대상 현황 제출서식

4. (붙임 2) 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 및 정비 결과보고 제출서식

5. 풍수해대비 안전점검표.  끝.