문서번호	도시철도설비부-2145
결재일자	2017.2.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설전기과장	도시철도설비부장
황영필	서태창	02/20 정찬웅

우이~신설 도시철도 민간투자사업 공정회의 결과 보고

- 정거장전기공사 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 02.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

우이~신설 도시철도 민간투자사업 공정회의 결과 보고

- 정거장전기공사 -

우이~신설 도시철도 민자사업에 대한 정거장 전기분야 공사추진 현안 사항 등에 대한 공정회의를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		현 황

○ 사업개요

- 규    모 : 총연장 11.4km(차량기지 1개소, 정거장 13개소)

- 사업기간 : '09. 09. 15 ～ '17. .

○ 공사업체 및 감리사 현황

공구명	시 공 사		감 리 사			비 고
	회 사 명	현장대리인	회 사 명	책임감리	전기감리
1공구	대우건설	김진호	(주)유탑ENG	홍명기	김재성	차량기지 3개정거장
2공구	두산건설	최원혁	(주)유신	박기만	방승철	4개정거장
3공구	고려개발	김일상	(주)협우지여ENG	서성태	김창수	3개정거장
4공구	포스코건설	허철웅	건원ENG	김대연	함영수	3개정거장

II		개 요

○ 건    명 : 우이~신설 경전철 착수 공정회의(정거장전기)

○ 일    시 : 2017. 02. 15(수) 15:00

○ 장    소 : 우이신설 도시철도 4공구 상황실

○ 참 석 자 : 시설전기과장, 업무담당, 전기감리원, 현장대리인

○ 회의내용 : 공구별 공정현황 보고 및 현안문제 협의

III		주요 현안사항

공구별 현안사항

○ 1공구

- 건축분야 천정 및 벽체마감 지연에 따른 전등,전열공사 지연

- 집수정 PIT 방수공사 지연에 따른 MCC 설치 지연

○ 2공구

- 건축분야 천정 모서리, 코너등 마감 지연에 따른 전등설치 지연

- 사인물, 광고, 자판기 등 설치위치 미확정에 따른 전열공사 지연

○ 3공구

- 건축분야 천정 및 벽체마감 지연에 따른 전등,전열공사 지연

- 방범셔터 제어반 위치 미확정에 따른 배관배선 지연

○ 4공구

- 건축분야 천정 및 벽체마감 지연에 따른 전등,전열공사 지연

- 화장실 마감지연에 따른 전등,전열공사 지연

지시사항

○ 지연되는 전기공사에 대하여 선행공종 독촉 등 공정관리 철저

○ 연단부 조명은 도면대로 시공할 것

○ 설계변경을 위한 조속한 실정보고

Ⅳ		향후 추진사항

○ 매월 공정회의 개최

○ 감리단 및 시공사는 전기공사 지연공정 관리 철저

첨 부 : 회의진행 사진.  끝.