문서번호	방재시설부-695
결재일자	2014.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
한종수		서관석	03/27 代홍석환
협조

「용허리공원 빗물저류조 설치공사」

설계변경(총괄3회, 2차3회) 시행 검토 보고

2014. 3

도시기반시설본부

(방재시설부)

『용허리공원 빗물저류조 설치공사 』

설계변경(총괄 3회, 2차3회) 시행 검토 보고

「용허리공원 빗물저류조 설치공사」시행 중 사토장 운반거리 변경, 저류조 기둥부 틀비계 반영, 지중구조물 처리비용 반영, 수문 설치 제외 및 2013년 설계심의 조치사항 반영 등 설계 변경 요인이 발생되어 계약금액 변경없이 설계변경 시행에 대하여 검토 보고 드림

1		관련근거

❍ 신명감 2014-194호(2014.3.24) : 공사 설계변경도서(총괄3회, 2차3회) 제출

2		공사개요

❍ 공 사 명 :『용허리공원 빗물저류조 설치공사』

❍ 공사규모 : 빗물저류조 V=15,000㎥

❍ 공사기간 : 2012. 12. 20 ~ 2014. 5. 30

❍ 총사업비 : 금11,000백만원

❍ 시공사/감리사 : 케이월드종합건설(주) / (주) 신명건설기술공사

3		설계변경 내용

❍ 주요변경 내용

- 사토운반거리 변경 등 3건 (증 565,404천원)

․ 사토운반거리 변경 : 당초 L=15Km → 변경 L=43.9Km (증 553,544천원)

․ 저류조 기둥부 강관틀비계 반영 : 당초 0㎡ → 변경 2,252㎡ (증 11,500천원)

․ 지중구조물 폐기물 상차비 반영 : 당초 0㎥ →  변경 999㎥ (증 360천원)

- 수문제작 설치 제외, 2013년 13차 설계심의 조치사항 반영 등 (감 565,404천원)

․ 수문제작 설치 제외 : 당초 1개소 → 변경 미설치 (감 557,770천원)

․ 2013년 13차 설계심의 조치사항 반영 (감 7,634천원)

- 유출관거 변경(D450→D600) : 당초 71,841천원 → 변경 64,317천원 (감 7,524천원)

- 임시저류조 운영 : 당초 243,185천원 → 변경 243,075천원 (감 110천원)

- 가설방음벽 설치(H=4.0m, L=306m) : 41,600천원(증감없음)

❍ 설계변경 내역

【총괄 공사비 변경(총괄 제3회)】

【단위:원】

구 분		당 초	변 경	증·감	비고
총 공 사 비		9,399,360,000	9,399,360,000	-
도급비	공급가액	6,932,291,818	6,932,291,818	-
	부가가치세	693,229,182	693,229,182	-
	합 계	7,625,521,000	7,625,521,000	-
관급자재비		1,252,639,000	1,252,639,000	-
이 전 비		521,200,000	521,200,000	-

【2차 3회 공사비 변경】

【단위 : 원】

구 분		당 초	변 경	증·감	비고
총 공 사 비		6,605,605,000	6,605,605,000	-
도급비	공급가액	4,392,514,545	4,392,514,545	-
	부가가치세	439,251,455	439,251,455	-
	합 계	4,831,766,000	4,831,766,000	-
관급자재비		1,252,639,000	1,252,639,000	-
이 전 비		521,200,000	521,200,000	-

4		감리단 의견

❍ 설계변경 사항에 대하여 실정보고 승인완료 후 설계변경자문회의 심의결과를 반영하였으며,

❍ 공사계약 일반조건 제19조~제23조에 의거 계약금액을 조정이 타당한 것으로 사료됨.

5		조치계획

❍ 책임감리원의 설계변경도서를 검토한 바, 관련 규정에 적정하므로 책임감리원의 검토의견대로    계약금액 변경없이 설계변경(총괄3회, 2차3회)을 시행하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 책임감리원 검토의견서 1부.

2. 설계서(총괄3회, 2차3회 변경) 각 1부

3. 관련 공문 각1부 .  끝