문서번호	방재시설부-3189
결재일자	2017.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		환경시설과장	방재시설부장
조양호		장수철	02/27 남궁용
협 조	주무관			박경희
	주무관			김도형
	주무관			추한영
	주무관			곽용길
	주무관			김동석
	주무관			채종철
	주무관			조양연

『중랑․탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역』

설계 경제성(VE) 검토 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 2.

도시기반시설본부

방 재 시 설 부

『중랑․탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역』

설계의 경제성(VE) 검토 시행계획

『중랑․탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역』관련 설계 경제성(VE) 검토를 시행하고자 함.

1		용역개요

○ 용 역 명 : 중랑․탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역

○ 용역기간 : 2015. 7. 8 ~ 2017. 3. 31

○ 용 역 비 : 중랑 1,645백만원, 탄천 1,194백만원

○ 용역업체 : 중랑/㈜도화엔지니어링 외 2, 탄천/㈜한국종합기술 외 3

2		추진경위

○ 2013. 5. 28 : 물재생센터 총인처리시설 설치계획(행정2부시장 방침 제183호)

○ 2015. 2. 25 : 4개물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역 시행계획

○ 2015. 7.  8 : 중랑․탄천 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2016. 2.  2 : 총인처리 공법선정을 위한 공법선정위원회 개최

○ 2016. 6.  5 : 중랑․탄천 기본설계 완료

○ 2017. 1. 23 : 중랑․탄천 특정제품(신기술-콘크리트절단) 선정 심사위원회 개최

○ 2017. 2.  2 : 중랑․난지․서남 특정제품(공법-부력방지앵커) 선정 심사위원회 개최

○ 2017. 2. 17 : 중랑․탄천 자문회의 개최

3		설계VE 시행계획

□ 관련근거

○ 건설기술진흥법 시행령 제75조(설계의 경제성 검토)

○ 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국교부고시 제2016-101호, ‘16.3.8)

- 설계 VE 대상 : 총공사비 100억 이상인 건설공사의 기본설계 및 실시설계

- 설계VE 검토 조직

‣ VE 책임자(Leader) : VE 전문교육 40시간 이상 이수자

‣ VE 퍼실리데이터     : VE 전문가 자격증 소지자

‣ VE 팀원             : 중요한 공종의 전문기술자 1인 이상 포함

□ 추진일정

○ 기 간 : 2017. 3. 9 ~ 3. 15

- VE위원 설계도서 배포         : 3.  6

- VE위원 설계도서 검토	: 3.  6 ~ 3. 15

- O/T 및 현장답사              : 3.  9

- 설계VE 워크숍 및 이행회의	: 3. 15

- 설계VE 보고서 제출           : 3. 20

○ 세부내용

구 분		내 용	비 고
O/T 및 현장답사	일 정	∙ 3.9(목) 09:00 ~ 18:00	아이디어 창출 및 평가, 기술검토회의
	장 소	∙ 중랑, 탄천물재생센터 회의실
VE 워크숍 및 이행회의	일 정	∙ 3.15(수) 13:00 ~ 17:00	대안의 채택여부 결정
	장 소	∙ 탄천물재생센터 회의실
참여자	VE 리더	∙ VE전문가 자격증 소지자	-
	퍼실리테이터	∙ VE전문가 자격증 소지자
	VE 위원	∙ VE 팀원(분야별 기술전문위원) 상하수도, 토목, 기계, 전기, 건축
	원설계사	∙ 원설계 책임기술자

○ 설계VE 조직구성

구 분		소 속	직 위	성 명	자격 또는 기술등급	비 고
총괄		도시기반본부 환경시설과	과장	장 수 철	-
VE리더		㈜열린이엔씨	이사	김 철 수	CVS	VE전문가
퍼실리테이터		㈜열린이엔씨	차장	박 대 완	CVS	VE전문가
외부전문가	상하수도	㈜KG엔지니어링	전무	조 현 석	상하수도기술사
	토목	도시구조안전㈜	전무	이 봉 열	토질및기초기술사
	기 계	㈜웨택	전무	전 선 태	특급기술자
	전 기	㈜삼진일렉스	상무	류 기 현	건축전기설비기술사
	건축	㈜삼안	상무	이 종 호	건축사

4		검토의견

○『엔지니어링산업진흥법』관련 VE수행 전문가 자격을 보유하고 하수처리시설 설계VE를 다수 수행한 업체와 각 분야별 외부전문가 5인으로 설계VE 조직을 구성하고

○ 설계사에 지시하여 설계 경제성(VE) 검토 시행

5		향후계획

○ 2017. 3. 31 : 용역준공

붙임  1) VE 전문가 자격증 각 1부.

2) 설계 VE 수행실적 1부.  끝.