문서번호	교통행정과-11613
결재일자	2017.3.2.
공개여부	대시민공개

주무관	교통개선담당	교통행정과장	안전건설교통국장		부구청장
안병원	김종식	이상수	박형중		03/02 김병환
협 조
	도로과장			최광천
	도로계획팀장			김학동
	도로시설담당			이상문
	보도관리담당			김제권

아리랑로 흥천사입구 교차로 개선 협업공사 완료

2017. 2.

안전건설교통국

교통행정과

아리랑로 흥천사입구 교차로 개선 협업공사 완료

아리랑로 ‘흥천사입구 교차로’의 좌회전 대기차량으로 인한 우회전 정체 완화를 위해 유관부서 협업을 통해 개선 공사를 완료하여 보고하고자 함.

Ⅰ		추 진 배 경

□ 2017. 1. 4 : “흥천사입구 교차로” 교통정체 해소방안을 도로과 합동조사하여 개선방안을 수립하여 추진 할 것. (부구청장 지시사항)

Ⅱ		추 진 사 항

□ 2017. 1.11 : “흥천사입구 교차로” 개선(안) 추진계획 수립(교통행정과-2196)

□ 2017. 1.12 : 성북경찰서 교통안전시설 규제심의 요청(좌회전차로 신설 등)

□ 2017. 2. 2 : 흥천사입구 교차로 개선 협업회의 개최

○ 일 시 : 2017.2.2.(목) 16:00~17:00 ○ 장 소 : 구청 11층 협업카페 ○ 주 제 : 흥천사입구 교차로 개선(안) 조기 추진방안 협의 ○ 참 석 : 교통행정과, 도로과, 치수과, 동선동, 성북경찰서 교통과 ○ 내 용 : - 성북경찰서 교통규제 조기 추진 협의 - 신속한 토목공사 방안, 공사 가능한 담당팀 협의 (공사검토 보도관리팀, 공사시행 도로시설팀)

□ 2017. 2. 9 : 교통행정과, 도로과 공사위한 현장실측 (※ 교통섬축소 위치표시)

□ 2017. 2.21 ~ 26 : 토목공사(교통섬 축소) 완료 ⇒ 도로과 공사 완료(토목)

□ 2017. 2.27 : 좌회전 차로 신설 등 차선도색 공사 완료 ⇒ 개선공사 완료(교통)

Ⅲ		개 선 내 용

□ 교통섬 약 1.0m~1.6m 축소, 횡단보도 위치 조정을 통하여, 좌회전 대기차로 확보 ⇒ 좌회전차량 약2대 대기, 좌회전차로 확보 □ 사업내용 - 토목공사 : 교통섬 축소 (약 B=1.0~1.6m, L=10m) - 교통공사 : 중앙선 이전, 좌회전차로 설치, 횡단보도 이전 등

Ⅳ		현 장 사 진

개선 전
개선 후