문서번호	산지방재과-2367
결재일자	2017.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		사면총괄팀장	산지방재과장
오동열		代오동열	03/03 김영삼
협조
	주무관		조영곤

우면산 산사태 복구지 경관복원사업 시행 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.  3.

푸른도시국

(산지방재과)

우면산 산사태 복구지 경관복원사업 시행 계획

우면산 산사태 복구지에 대한 안정적인 도시숲 복원과 건전한
산림생태계 유지관리를 위해 경관복원사업을 추진하고자 함

Ⅰ		사 업 배 경

○ 등산로 및 남부순환로의 가시권에 있는 사방시설물에 대한 경관향상 요구 증가

○ 사방사업 후 훼손된 산림경관 및 덩굴식물, 생태교란종 유입에 따른 산림생태계 복원 필요

※	‘15~16년 우면산 산사태복구지 생태환경 모니터링 연구용역       결과에 따른 후속 사업임

Ⅱ		사 업 개 요

○ 공 사 명 : 우면산 산사태 복구지 경관복원사업

○ 위    치 : 우면산 산사태복구지

○ 면    적 : 6개소, 8,000㎡

○ 사업예산 : 250백만원

○ 사업기간 : 2017. 3. ~ 2017. 10.

○ 사업내용 : 복구지차폐 및 경관녹화, 소생물서식공간 등 동물생태환경 조성, 덩굴식물 및 생태교란종 제거

Ⅲ		추 진 계 획

□ 추진 방향

○ 사방시설 주변 도보가시권 및 조망가시권의 직간접 경관 · 차폐 식재

○ 소생물서식공간 등 동물생태환경 조성

○ 우면산 전역으로 확산 중인 칡덩굴 및 위해식물 우선 제거 대상지 선정, 집중제거

□ 추진 방법

○ 실시설계 : 수의계약(2천만원 이하)

※ 사 유 : 설계 및 공사기간 단축과 품질향상을 위해 관련 설계경험이 있는 전문업체와 수의계약 시행

○ 시설공사 : 일반경쟁입찰

Ⅳ		향 후 계 획

○ ’17. 3월  ~ 4월 : 설계용역 시행, 설계심의

○ ’17. 5월         : 계약심사

○ ’17. 6월  ~ 8월 : 시설공사 시행

Ⅴ		기 대 효 과

○ 사방 구조물의 미관과 이미지 개선으로 친자연적 시설로서 가치 향상

○ 덩굴식물 및 생태교란종 제거로 건전한 산림생태계 유지 및 경관향상. 끝.