문서번호	버스정책과-6378
결재일자	2017.3.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		버스정책팀장	버스정책과장
강설영		지우선	03/08 김태명
협조

2016년 가로변정류소 이용환경 개선사업

준공기한 연기 검토보고

2017. 3.

버스정책과

2016년 가로변정류소 이용환경 개선사업 준공기한 연기 검토보고

2016년 가로변정류소 이용환경 개선사업 계약 건별 공사기간 부족으로 준공일까지 공사가 불가능한 실정으로 준공기한을 연기하고자 함

１		사업개요

□ 사 업 명 : 2016년 가로변정류소 이용환경 개선사업

□ 사업목적

○ 시내버스정류소 이용환경 개선과 가로(보도)시설물 등에 의한 정류소 접근 및 승하차 불편해소

○ 지역 및 현장여건에 맞는 독창적이면서 매력적인 버스정류소 구현

□ 사업내용

○ 사업대상지 : 서울시 종로구 KT광화문지사 정류소 등 46개소

- 무장애정류소 설치 : 41개소

- 디자인승차대 설치 : 5개소

○ 사업내용

구분	공사			물품구매	용역
	토목공사	전기공사	디자인승차대 설치공사	디자인승차대 제작	건설폐기물 처리용역
사업 내용	승차대(서울시 표준형) 설치 무장애정류소(승강장) 설치 토공, 포장, 부대공사 등	전기공사(배관, 배선공사) 버스정보안내단말기(알뜰BIT) 설치 비콘, 맨홀, 누전차단기 등 설치	공모전 수상작품(승차대 및 의자 등) 제작 제작용 설계 및 구조검토	디자인승차대 설치 기초설치 조명설치	가로변정류소 이용환경 개선사업대상지에서 발생되는 폐아스콘, 폐콘크리트 등 건설폐기물처리

2		준공기한 연기 검토

□ 계약내역

공사명	계약상대자	계약금액	계약일자	착공일자	준공일자
2016년 가로변 정류소 이용환경 개선공사	주식회사 태영테크 대표 홍성권	금1,064,417,150원	2016. 12. 9.	2016. 12. 12.	2017. 3. 11.
2016년 가로변정류소 이용환경 개선사업 전기공사	㈜일렉트릭이앤지 대표 배용	금199,967,740원	2016. 11. 11.	2016. 11. 16.	2017. 4. 30.
2016년 디자인승차대 공모전 수상작품 설치공사	㈜에이스공영 대표 박준영	금24,779,660원	2016. 11. 25.	2016. 11. 28.	2017. 3. 27.
2016년 디자인승차대 공모전 수상작품 제작	㈜씨티이안 대표 배춘규	금201,433,510원	2016. 12. 7.	-	2017. 4. 6. (납품기한)
2016년 가로변정류소 이용환경 개선공사 건설폐기물 처리용역	㈜벽성그린산업 대표 황윤남	금21,829,500원	2016. 12.. 14.	2017. 3. 2.	2017. 5. 30.

□ 준공기한 연기내역

공사명	준공기한		연기 일수	귀책사유
	당초	변경
2016년 가로변 정류소 이용환경 개선공사	2016. 12. 12.~ 2017. 3. 11.	2016. 12. 12.~ 2017. 6. 30.	111일	서울특별시
2016년 가로변정류소 이용환경 개선사업 전기공사	2016. 11. 16.~ 2017. 4. 30.	2016. 11. 16.~ 2017. 6. 30.	61일
2016년 디자인승차대 공모전 수상작품 설치공사	2016. 11. 28.~ 2017. 3. 27.	2016. 11. 28.~ 2017. 6. 30.	95일
2016년 디자인승차대 공모전 수상작품 제작	2017. 4. 6.	2017. 6. 30.	85일
2016년 가로변정류소 이용환경 개선공사 건설폐기물 처리용역	2017. 3. 2.~ 2017. 5. 30.	2017. 3. 2.~ 2017. 6. 30.	31일

※ 전기공사 : 1차 준공기한 연기 시행(2016. 11. 23.) [당초 : 2016. 11. 30. → 변경 : 2017. 4. 30.] 준공기한 연기 사유 : 전문공사가 수반되지 않고 전기공사만 단독으로 진행 불가

□ 연기사유

○ 도로굴착 허가 심의 지연 및 겨울철 도로굴착 통제기간으로 인한 공사기간 부족으로 준공기한 연기하고자 함

- 2016년 가로변정류소 이용환경 개선공사 발주 및 계약(2016. 12. 9.)을 체결하였으나, 현재 도로굴착 허가 심의 단계 중임

․ 2017년 상반기 도로굴착사업계획 접수 및 심의(중구 등 21개 자치구) : ’17. 1.~3.

- 겨울철 도로굴착 통제기간(2016. 12. 1.~2017. 2. 28.) 공사진행 불가

○ 도로굴착 허가 심의 지연에 따른 전기공사, 건설폐기물처리용역, 디자인승차대 제작, 디자인승차대 설치공사 준공기한 연기 불가피함

- 무장애정류소, 디자인승차대 설치를 위해 토목공사가 진행되어야 하므로 토목공사 준공일에 맞춰 준공기한 연기

3		조치계획

□ 변경계약의뢰(재무과)

□ 공사, 용역, 물품구매 준공 : 2017. 6.  끝.