문서번호	조경과-1246
결재일자	2017.3.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	주무관	조경과장
최혜진	김효준	전결 03/08 강인호
협 조
	시설과장			공헌구

도시농부텃밭전시장 온실유리 현황 검토보고

2017. 3.

조경과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

도시농부텃밭전시관 온실유리 현황 검토보고

도시농부텃밭전시관 온실유리 파손으로 인한 관람객 안전 위험성이 대두되어 그 현황을 아래와 같이 보고함

□ 시설현황

○ 위    치 : 도시농부텃밭전시관(동물원 정문)

○ 규    모 : 유리온실 지상 1층 691.2㎡(36×19.2×4.75m)

○ 구    조 : 경량철골조, 일반유리(5mm, 1×1.7~2m)

온실 전면부	온실 내부

□ 추진경위

○ ‘09. 3. ~ 7. : 유리온실 신축공사(사업비 246백만원)

○ ‘13. 6. 21 : ‘11년도 GB항측 시정 최종계고(과천시 → 대공원)

▸원상복구 미조치시 고발 및 이행강제금 부과(50백만원)

○ ‘13. 8.  8 : 친환경체험전시장 정비·보완 계획 수립

▸GB관리계획 반영(‘11.5.27), 공원조성계획 변경(‘12.3.2)이 완료되었으나 미착공 상태였던 장미원 유리온실을 현재 위치로 변경

○ ‘14. 11. ~ 12. : 철거 및 재건축(사업비 78백만원)

○ ‘15. 2. 17 : GB내 건축물 사용승인 허가(과천시 → 대공원)

□ 문 제 점

○ 현재 시공된 온실유리는 무코팅 일반유리로 사이즈가 지나치게 크게 제작·설치(1×1.7m)되어 외부 충격에 취약한 상태임

○ 또한 약한 경량철골조 프레임으로 인하여 구조체가 흔들리면서 온실유리가 지속적으로 파손된 것으로 판단됨

※ 파손된 유리수량 : 총 23개(지붕 8개, 벽체 15개)

○ 특히 지붕 유리가 깨져 떨어질 경우 전시관 내 관람객이 다칠 위험성이 매우 큰 상황임

□ 향후대책

○ 관람객의 안전을 최우선으로 고려하여 **************

○ 건축구조 전문가(서울시 건설기술심의위원) 자문 실시

○ 자문 결과에 따라 구체적인 개선방안 수립

□ 추진일정

○ ‘17. 3.  8 : 시설과와 합동조사 완료

○ ‘17. 3. 13 ~ 3. 17 : 건축구조 전문가 자문 실시

○ ‘17. 3. 20 ~ 3. 24 : 개선방안 수립

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.