문서번호	도로과-@N
결재일자
공개여부	비공개(5)

주무관	도로시설담당	도로과장	안전건설교통국장
협 조
	기획예산과장
	예산담당

2017년 도로시설

유지보수공사 발주 계획

2017. 2.

안전건설교통국

치수과

2017년 도로시설 유지보수공사 발주 계획

우리구 관내 도로시설물 유지 관리를 위해 시행예정인 건설사업에 대하여 신속한 민원처리 및 원활한 폐기물관리를 위하여

아래와 같이 시행하고자 함.

※ 추진배경 : ‘17년도 도로시설 유지관리 예산사업 확정

구 소규모 편익시설(도로) 설치 예산사업 확정

Ⅰ		사업 예산 현황

□ 2017년 도로시설물 유지관리

연번	사 업 명	사 업 비 (천원)	비고
1	도로시설물 유지보수 공사	740,000	구 예산
2	신속대응팀 운영	200,000	구 재난관리기금
3	어르신 보행 편의를 위한 안전 손잡이 설치	10,000	구 주민참여예산
4	동선동 높이제한 표지판 설치	6,000	구주민참여예산
5	길음1동 자동염수시설 설치	24,000	구주민참여예산
6	정릉로 방호울타리 교체 및 신설공사	200,000	시 재배정사업
7	북악산로 안전휀스 설치	100,000	시 재배정사업
8	쿵!쿵!쿵! 이제 그만(청덕초교 주변)	54,000	시주민참여예산
	합 계	1,334,000

□ 구 소규모 편익시설(도로) 사업

연번	사 업 명	사 업 비 (천원)	비고
1	구 소규모 편익시설(도로) 설치 공사	970,000	구 예산
2	과속방지턱 설치 및 도색 공사	100,000	구 예산
	합 계	1,070,000

Ⅱ		문제점 및 대책

□ 문제점

- 상기와 같이 단위사업 및 주민참여예산 사업으로 확정되어 단위사업으로 추진하여야 하나 도로시설물 유지관리 업무상 동일성격의 사업이며,

- 개별 사업 추진시 사업비 부족 발생에 따른 지속 추진의 어려움

및 폐기물 집하장이 산재되어 사업 관리에 어려움이 있음.

□ 대 책

- 상기 사업은 도로시설물 유지관리 측면에서 동일 성격의 사업이며,

각 단위 사업으로 추진시 폐기물 관리 등 사업 관리에 어려움이

있어 업무의 효율성 확보를 위하여 연간단가 사업으로 시행 예정인 「2017년 도로시설물 유지보수공사(연간단가)」사업(1,334백만원) 및 「구 소규모 편익시설(도로) 설치 공사(연간단가)」사업(1,070백만원)으로 일괄 발주 시행하여 조속한 민원 해결 및 안전한 도시환경을 조성코자 합니다.

□ 발주계획

○ 2017년 도로시설물 유지보수 공사

- 총사업비 : 1,334백만원

- 사업규모 : 차량 방호 울타리정비, 신속대응팀 운영,

도로정비 1식 등

- 계약방법 : 제한경쟁입찰

건설산업기본법에 의한 시설물유지관리업 면허를 소지하고

입찰일까지 주된 사무실을 서울시에 두고 있는 업체

○ 구 소규모 편익시설(도로) 설치 공사

- 총사업비 : 1,070백만원

- 사업규모 : 과속방지턱 정비, 이면도로 정비 1식 등

- 계약방법 : 제한경쟁입찰

건설산업기본법에 의한 포장공사업 면허를 소지하고

입찰일까지 주된 사무실을 서울시에 두고 있는 업체

Ⅲ		향후 계획

□ 상기 주민참여예산 사업에 대하여 시공업체 선정후 우선적으로 작업지시하여 공사를 조속히 시행코자 함.

○ 2017. 02. 24 : 일상감사 의뢰

○ 2017. 02. 27 : 공사 발주

○ 2017. 03. 15 : 공사 계약 및 착공

○ 2017. 03. 21 : 공사 작업지시 시행. 끝.