문서번호	시설관리과-4835
결재일자	2017.3.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
손현정		김근용	03/09 고신석
협 조
	주무관			문병희

공사근로자 노무비 지급 적정성 검토 보고

[2016년 강서, 양천, 구로구 일대 긴급누수복구공사(2월분)]

2017. 3.

강서수도사업소

(시설관리과)

공사근로자 노무비 지급 적정성 검토 보고

2016년 강서, 양천, 구로구일대 긴급누수복구공사(장기계속단가) 계약업체에서 제출한  ‘공사근로자 노무비 청구’의 적정성 검토 보고임.

1. 관련 근거

가. 하도급 대금지급 확인시스템(시장방침 제93호, 2012.4.1)

나. 계약예규 : 9.공사계약 일반조건

1) 제43조의2(하도급대금 등 지급확인)

2) 제43조의3(노무비의 구분관리 및 지급확인)

다. 공사 근로자 노무비 청구서 접수안내(행정지원과-5158호, 2017. 3. 08)

2. 공사 현황

가. 공 사 명 : 2016년 강서, 양천, 구로구일대 긴급누수복구공사(장기계속단가)

나. 공사개요 : 누수복구 1,000개소, 불용관 정비 450개소

다. 계 약 일 : 2016. 04. 29

라. 착 공 일 : 2016. 05. 02

마. 준공기한 : 2017. 06. 30

바. 수 급 자 : ㈜ 범흥건설, 대표 김판권

승원건설 ㈜, 대표 예수희

사. 공사금액(도급비) : ***************(2차수금액 : 939,111,870원)

3. 보고 내용

가. 노무비 청구현황

1) 노무비 청구일 : 2017년 3월 08일

2) 노무비 청구월 : 2017년 2월분

3) 노무비 총  액 : ************************

4) 노무비 청구금액 : *37,312,110원

- ㈜범흥건설 : 금15,033,920원

- 승원건설㈜ : 금22,278,190원

5) 노무비 지급내역                                            (단위:원)

공 사 명	노무비 총액	전월까지 지급금액	금월 청구금액 (1월분)	총 청구금액	잔여금액
2016년 강서, 양천, 구로구 일대 긴급누수 복구공사(장기계속단가)	906,750,504	402,765,120	37,312,110	440,077,230	466,673,274

나. 공사진행 현황

- 현재 공정율 : 80%(누수접수대장 ’17년 2월말 기준)

※ 공정율 = 작업완료 개략공사비 / 도급비

= 2,034,780천원 / *********천원 = 80%

다. 노무비 적정성 검토

검토항목	검토기준	검 토 내 용		검 토 결 과
노무비 청구금액 적정성	노무비 청구요청 금액과 실근로자 지급금액 일치 여부 확인	노무비 청구요청 금액	37,312,110원	적 정
		실 근로자 지급금액	37,312,110원
		누계(노무비 지급금액)	440,077,230원
		노무비 청구율 (노무비 총액 기준)	48.5%
		관련자료	근로자 지급명세서 (부가세 별도)
	실 공정률 보다 노무비 청구율이 적은지 확인	노무비 총액	906,750,504원	적 정
		노무비 청구가능 금액 (실 공정율 기준)	466,673,274원
		실 공정율	51.4%

4. 행정 사항

가. 공사근로자 신상 확인 및 본인 통장 여부 확인등 노무비 청구서 적정성에         대해 검토한 바 적정하다고 판단되어 대금 지급을 승인코자 하며,

나. 승인된 공사근로자 대금(노무비) 지급여부 확인시행(지급일로부터 5일이내)

붙  임  1. 공사근로자 노무비 청구 관련서류 1부.  끝.