문서번호	교통지도과-7358
결재일자	2017.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		주차기획팀장		교통지도과장	안전건설교통국장
이종석		박광호		고영임	03/10 김재겸
협조

★ ◉

- 여성이 안전한 주차장 이용을 위한 -

공영주차장 여성 안심 비상벨 설치 계획

성   동   구

(교통지도과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 ☑ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통·갈등 분야 고려사항		●	구민			:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	전문가			:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	이해당사자			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	갈등발생요인			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 ☑ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 □ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	기업	:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	민간단체	:	유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

- 여성이 안전한 주차장 이용을 위한 -

공영주차장 여성 안심 비상벨 설치 계획

공영주차장 내 “여성 안심 비상벨”을 설치하여 범죄 예방 효과와 안심하고 주차장을 이용할 수 있는 안전한 주차장 환경을 조성하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

2017년 서울시 주민참여예산사업 선정(서울시 재정관리담당관)

- 선정사업명: “안심 비상벨” 여성의 안전한 귀가 지킴이로!

2017년 주민참여예산사업 예산 교부 안내(서울시 주차계획과)

공영주차장 범죄예방을 위한 안심비상벨 설치 발주 요청(성동구도시관리공단)

Ⅱ		사 업 개 요

사업기간: 2017. 3. ~ 12.

설치대상: 총 32개소(공영주차장 18개소, 화장실 14개소)

구 분	총 계	주 차 장		총 계	화 장 실
		건 물	평 면		공 용	개 별
개 소	18	13	5	14	10	4

추진사항

- 공영주차장 안심 비상벨 설치(주차장, 도시관리공단상황실)

- 공영주차장 범죄예방 안전망 구축(성동경찰서)

소요예산: 50,000천원(시비)

Ⅲ		세 부 추 진 계 획

공영주차장 안심 비상벨 설치

- 설치장소: 공영주차장 각층, CCTV 사각지대 및 화장실

- 설치수량: 송신기(비상벨) - 266개, 수신기 - 63개

구 분	구획수	송 신 기(비상벨)				수신기
		층 수	각 층수량	총수량	화장실
개 수	1,994	63	72	252	14	63

- 제품내역: 공영주차장 내 각층 및 화장실 송신기와 수신기

구 분	송신기(ST-700)	송신기(ST-100)	수신기(SR-A610)	비 고
사 진
용 도	각 층	화장실	사무실,지구대

공영주차장 범죄예방 안전망 구축

- 대    상: 공영주차장 인근 지구대(관할지역)

- 추진내용: 사고발생 시 비상연락 및 현장출동

- 운영체계도

주 차 장	➪	비 상 벨	➪	상 황 실	➪	현장출동
“비상상황” 비상벨 호출		경광등 작동 상황정보 송출		주차상황실 지 구 대		담당직원 지 구 대

- 도시관리공단상황실 및 경찰서(지구대) 연동시스템

추진일정

- 2017. 3.: 비상벨 설치 및 성동경찰서와 도시관리공단 MOU 체결

시범운영 후 지구대 연동 테스트 및 문제점 보완

- 2017. 4.: 정상운영 실시

계약방법

- 수의계약(지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 및 제30조 제1항 제2호)

- 선정업체: (주)씨스콜씨앤에스(대표: 강정숙, 사업자등록번호: 701-87-00593)

(☏ 02-2278-7300)

-「공공구매통합관리시스템」조회 결과: 여성기업 / 원활한 비상벨 운영을 위하여 비상벨 설치 경험이 풍부한 업체 선정 - 성동구민종합체육센터 수영장 비상벨 설치, 마장국민체육센터 수영장 비상벨 설치, 성동구 공원화장실 9개소 비상벨 설치 등

Ⅳ		소 요 예 산

사업비: 50,000천원 / 시비

- 시설비: 공영주차장 안심 비상벨 구축 비용

통신비: 1,320천원(월 5,500원 × 20개소 × 12개월)

- 도시관리공단 사업예산(사업비용-영업비용-대행사업비-일반운영비-공공운영비)

Ⅴ		기 대 효 과

범죄사고 예방 및 안전한 주차장 환경조성

유관기관과 연계된 안전망 구축으로 안전에 대한 신뢰성 제고

붙임  공영주차장별 송수신기 현황 1부.

[붙임] 공영주차장별 송수신기 현황

연번	주차장명	구획수	송 신 기(비상벨)				수신기
			층 수 (지하․옥상포함)	각 층 수 량	총 수 량	화장실
합 계		1,994	63	72	252	14	63
1	하왕십리	101	5	4	20	1	5
2	도선동	186	3	4	12	1	3
3	마장동	55	6	4	24	1	6
4	마장동(평면)	35	1	4	4	-	1
5	살곶이(평면)	102	1	4	4	-	1
6	응봉동	71	4	4	16	1	4
7	응봉동(평면)	69	1	4	4	-	1
8	금호초등학교	124	3	4	12	1	3
9	강변	107	4	4	16	1	4
10	성수2가1동	165	5	4	20	1	5
11	성수2가3동	198	4	4	16	1	4
12	송정동	122	5	4	20	1	5
13	용답동	168	5	4	20	1	5
14	홍익동	85	5	4	20	1	5
15	용답토속(평면)	159	1	4	4	1	1
16	마장동서문	130	6	4	24	1	6
17	성수1가2동(평면)	21	1	4	4	-	1
18	성수1가1동	96	3	4	12	1	3