투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	설계용역 설계변경(총차,3차)계약의뢰 (탄천변 동측도로 확장공사 실시설계)

우리부에서 시행 중인『탄천변 동측도로 확장공사 실시설계용역』에 대하여 아래와 같이 변경계약(총차, 3차)을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 탄천변 동측도로 확장공사 실시설계용역

2. 용역개요 : 총차 (도로확장 4~6차로, 연장 4.9㎞)

3차 (타당성조사 및 기본계획용역)

3. 용 역 사 :  (주)동일기술공사, (주)수성엔지니어링

4. 변경계약 내역(총차,3차)

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
용 역 비	총차	4,257,347,000	4,257,247,000	감)100,000
	3차	250,000,000	249,900,000	감)100,000
용역기간	총차	'08.12.31.~'16.12.31.	'08.12.31~'17.3.31.	변경없음
	3차	'16. 4.29.~'16.12.31.	'16. 4.29~'17.3.31.	변경없음

5. 예산과목 : (교통사업특별회계)도로계획과, 간선도로망 확충, 탄천변                              동측도로 확장, 시설비(401-01)

6. 변경사유 : 3차분 설계자문비 실비정산에 따른 감액

붙임 :  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 변경계약의뢰(도로계획과) 1부.

3. 설계변경 검토보고 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	이상욱B		토목설계과장	여용석		토목부장	03/15 김영수
협조자	주무관	김동수		★경리과장	최정수
시행	토목부-5354	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 12층 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2589	/전송	02-3708-2599	/	bestwook84@seoul.go.kr	/	부분공개(5)