문서번호	기술심사담당관-5500
결재일자	2017.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호	행정2부시장 방침 제62호

				시 민
주무관	기술지원팀장	기술심사담당관		행정2부시장
오영진	류용열	김홍길		03/16 이제원
협 조
	기술관리팀장		조현석
	토목심사팀장		조임남
	건축심사팀장		도태환

건설공사장 외부전문가 기동점검단 활동결과 보고(2월)

2017. 3.

서울특별시

기술심사담당관

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	외부전문가 주관 점검실시
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

건설공사장 외부전문가 기동점검단 활동결과 보고(2월)

우리시 주요 공사현장을 대상으로 실시하고 있는 「외부전문가 기동점검단」의 `17년 2월 중 활동 결과에 대하여 보고 드림

1. 점검개요

점검일자	2017. 2. 7.(화)	2017. 2. 14.(화)	2017. 2. 25.(토)	2017. 2. 28.(화)
공 사 명	둔촌로 하수암거 신설공사	동부간선도로 확장공사(2공구)	서초역~방배로간 도로개설공사	거여동 12-1 장기전세주택 건설공사
사업부서	강동구청 치수과	도기본 토목과	도기본 방재시설부	서울주택도시공사
공사기간 (공정률)	`15.04.07. ~ `17.12.31.(55%)	‘08.12.30.~ ’19.12.30.(43%)	‘15.02.25. ~ ’19.01.31.(27%)	‘15.11. ~ ’17.08.(36%)
점검자	· 시지이엔씨(주) 이봉열 · 한국건설기술원 황윤국 · ㈜대한이엔씨 박주경 (직원 : 토목심사팀 3)	· 창건이엔씨 박지배 · 영진엔지니어링 김상석 · 세안안전진단 정운수 (직원 : 기술관리팀 2)	· 한맥기술 박윤규 · 스마트이엔씨 이상범 · 도명건설 이섬범 (직원 : 토목심사팀 2)	· 네오크로스구조 김정선 · 포스코A&C 최범종 · 한국가설협회 김곤묵 (직원 : 건축심사팀 3)

2. 중점 점검사항

❍ 현장대리인, 책임감리원 등 근무실태

- ONE-PMIS에 작업일보 작성 및 현장내 장비와 인력투입현황 관리여부

- 현장반입 건설기계 임대차 계약서 작성, 대여대금 지급보증서 교부여부 확인

- 현장대리인 및 참여기술자(감리원) 현장근무 여부 확인 등

❍ 가시설 및 토공, 안전물 설치상태 등 시공상태 확인

- 어스앵커부 지하수 유출구간관리 실태 점검

- 암거 및 가시설 시공 상태 점검

❍ 구조물에 대한 품질․안전․공정관리 등 시공관리

- 콘크리트 타설 등 구조물 품질관리 실태

- 본선구간 및 확폭부 기초 보강 상태 점검

- 작업공간 주변정리 정돈 등 안전관리 실태 점검

3. 점검결과

□ 총 지적사항

공 사 명	계	안전관리	품질관리	기 타
계	42	22	13	7
둔촌로 하수암거 신설공사	9	6	3	-
동부간선도로 확장공사(2공구)	6	3	3	-
서초역~방배로간 도로개설공사	7	5	1	1
거여동 12-1 장기전세주택 건설공사	20	8	6	6

□ 분야별 주요 지적사항

안전관리 분야

- H-Pile 및 띠장(wale)은 고재(감도계수 0.9)를 적용하여 검토되었으나 버팀보의 경우 감도계수가 적용되어 있지 않으므로 시공시 유의하여 적용할 것(둔촌로하수암거 신설공사)

- 작업자의 이동 및 작업반경 내에 지장물이 많으므로 작업자 안전을 위한 통로 확보 필요(둔촌로하수암거 신설공사)

- 둔촌사거리 이설수로 작업구간(0+30~1+20)이 편도 4차로에서 2차로로 좁아지므로 교통사고 위험 우려됨(둔촌로하수암거 신설공사)

- 어스앵커부 지하수 유출구간은 흙막이 안전을 위하여 토립자 유출 방지 조치 필요(동부간선도로 확장공사 2공구)

- 본선구간의 흙막이 중간파일은 보조파일로 보강되었으나 확폭부 중간파일은 보강되지 않아 검토 필요(동부간선도로 확장공사 2공구)

- 터널 상부 반단면 강지보 설치지점 일부 물고임(서초역~방배로간 도로개설공사)

- 터널 외부 흙막이 구간 어스앵커 고정부 관리 요망(서초역~방배로간 도로개설공사)

- 지하철 7호선 인접구간 자동화 계측 보완 검토 요망(서초역~방배로간 도로개설공사)

- 불량, 불법 가설기자재 선별 후 사용요하며 자재 적재방법이 미흡함(거여동 12-1 장기전세주택 건설공사)

품질관리 분야

- 동절기 콘크리트 타설을 위해서는 온도관리를 적절히 할 필요 있으므로 대기온도와 열풍기 가동에 의한 온도 상승 비교표가 있어야 함(둔촌로하수암거 신설공사)

- 박스단면과 아치단면 연결부에 발생된 균열에 대해 주기적인 점검 및 보완 필요(동부간선도로 확장공사 2공구)

- 매달기가 되어 있는 한전 맨홀 벽체부와 지하차도 상부 슬래브 접합부 방수시공 철저 필요(동부간선도로 확장공사 2공구)

- 케이블 록볼트(타이 볼트)에 대한 시공관리 미흡(서초역~방배로간 도로개설공사)

- 지하층 Y1열, X11~14열 부분 지하 외벽 구조 검토 요함. 중간층 STRUT를 해체하고 지하외벽을 2/3H 정도 타설하였음. 이것은 STRUT의 수평력을 지하외벽이 캔틸레버로 지지하고 있으므로 구조설계시의 조건과 상이함(거여동 12-1 장기전세주택 건설공사)

- 동바리의 상․하부 고정, 수평연결제 사용, 수직선 정렬 미흡(거여동 12-1 장기전세주택 건설공사)

기타 분야

- 주요 공종 추진시 공사관리관의 입회에 대한 확인 자료가 없음(거여동 12-1 장기전세주택 건설공사)

4. 조치계획

□ 지적사항은 점검 당일 시공업체 및 감리단(감독)에 전달하여 시정토록 조치

- 발주부서에서 지적사항 시정 및 현장관리토록 공문으로 통보 조치

붙임 : 점검 주요 지적사례 1부.  끝.