투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰 (여의도 지하벙커 개선 기계설비공사)

1. 설비부-4743 (2017.3.23.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 아래와 같이 □여의도 지하벙커 개선 기계설비공사(1차)□의 준공기한 연기를 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기 의뢰 내용

구분	준 공 기 한		비 고
	당 초	변 경
1 차	‘16.11.08. ~ ‘17.03.31.	‘16.11.08. ~ ‘17.06.30.	금액 변동 없음
총차	‘16.11.08. ~ ‘17.06.30.	좌 동

나. 귀책소재 및 연기사유

1) 연기에 따른 귀책소재 : 서울시 도시기반시설본부

2) 지체상금 부과여부 : 미부과

3) 연기사유 : 선행공종인 건축공사 공기 연장에 따른 준공기한 연장

붙임  1. 준공기한 연기 의뢰서 및 검토보고서	각 1부.

2. 준공기한 연기 감리보고 및 합의이행각서	각 1부.  끝.

	설비부장
주무관	백민		열빛총괄과장	유병기		설비부장	03/23 권오식
협조자
시행	설비부-4757	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어 플레이스 빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8605	/전송	02-3708-8659	/	100min@seoul.go.kr	/	부분공개(5)