문서번호	시설관리과-6685
결재일자	2017.3.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	강남수도사업소장
강희창	박희철	03/23 차장운
협 조
	행정지원과장		김인웅
	주무관		김문주

“명품 아리수, 명품 강남수도”
준공기한 연기 보고 (교통소통대책 수립 용역) (이수고가차도~사평지하차도간)

2017년 3월 23일

강남수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	한국산업기술 시험원
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

준공기한 연기(교통소통대책 수립용역)

(이수고가차도~사평지하차도간 배수관정비공사)

이수고가차도~사평지하차도간 배수관정비공사건의 교통소통대책 수립 용역건의 준공기한을 도로점용공사장 교통심의 일정 등을 감안하여 준공기한을 연장하고자 함.

□ 용역현황

○ 용 역 명 : 이수고가차도~사평지하차도간 배수관정비공사 교통소통대책수립 용역

○ 용역개요 : 사평대로(성모병원사거리→이수교차로방향) 0.6㎞

○ 계 약 자 : (주)상상이앤씨, 대표 안정림

○ 용역금액 : 9,405,000원

○ 용역기간 : 2017. 2. 17. ~ 2017. 3. 28.

□ 준공기한 연기사유 및 기간

○ 연기사유

- 도로점용공사장 교통소통대책 심의회의 요청을 3월14일(시설관리과- 5916)하였으나, 교통소통대책 자문회의가 준공일 이후에 예정되어 있어,

- 본 용역의 과업지시 내용과 같이 교통처리심의 위원회 승인 통과시까지 공기를 연장할 수 있는바, 자문회의 심의결과에 따른 승인 조건 및 보완사항을 처리하기 위하여 준공기한을 4. 28(금)까지 연기하고자 합니다.

○ 준공기한 연기 : 당초 2017. 3. 28(화)

변경 2017. 4. 28(금)

□ 조치의견

○ 계약 상대자인 (주)상상이앤씨 대표 안정림에게 용역 준공기한 연기내용을 통보하여 변경계약을 추진 하고자 합니다.

- 준공기한 : 당초 2017. 3. 28(화)

변경 2017. 4. 28(금)

- 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임 : 합의서 1부.  끝.