“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	설계변경 심사 재 요청(신림~봉천 터널도로 2공구 건설공사_설계변경)

1. 계약심사과-3378(2017.02.21.), 토목부-6149(2017.03.24)호와 관련입니다.

2. 위 호로 설계변경 심사 보완 요청한「신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)」는 사업계획 변경 조치 기간에 따른 설계변경 재 요청 심사건으로 우리과에서 수차례 검토하여 지적된 사항에 대해서는 설계내역서, 도면, 시방서 등 변경된 내용으로 설계변경 재 심사를 요청하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

1) 책임건설사업관리기술자 설계변경관련 검토의견서

- 반드시 서면으로 책임건설사업관리기술자에게 설계변경 지시 서류

2) 해당분야별(터널공법 변경 등) 실정보고 및 승인서류

- 발파패턴은 실시설계보고서 내용으로 설계된 사항으로 설계반영

3) 설계변경당시 근거자료

- 도면 승인한 때, 작업지시를 한 때, 우선시공을 지시한 때

4) 증가된 공사량의 협의율 적용근거 관련자료

- 합동회의 실시 협의(계약상대자, 감리단, 발주청) 공문(보고서) 및 발주청

승인서류(최종 합의된 안으로 통보)

5) 견적서, 1식단가는 산출근거 제출받아 원가계산방식으로 재 산출

- 변경설계서(도면, 시방서, 물량내역서 등)제출

6) 설계변경내역서 당초, 변경 구분하여 제출

- 당초와 변경의 물량 비교표.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	신정		토목심사팀장	김종호		계약심사과장	전결 03/29 안호
협조자
시행	계약심사과-6629	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서울시청 서소문별관 제1동 9층)	/	http://seoul.go.kr
전화	2133-3329	/전송	2133-1032	/		/	대시민공개