자문 검토 의견서

○ 난곡사거리～미성초등학교 간 송배수관 정비공사

안 건	검 토 의 견
난곡사거리～미성초등학교 간 송배수관 정비공사	1. 공사 장비(굴착 및 운반) 상세 제원(상세도 포함) 추가 제시 1) 장비별 규격, 폭, 길이, 윤거, 차륜내폭 및 외폭 등 2) 굴착장비별 차량 적재시 최소회전반경(도면상에는 구간별 굴착장비가 상이한 경우에도 회전반경이 동일) 2. 굴착 상부폭과 굴착장비 차륜 내폭 및 운반차량 후륜 차륜 내폭을 단계별 공사방법(전진굴착 전진적사, 전진굴착 회전적사, 후진굴착 회전적사) 적정성 재검토 3. 교차로 구간 굴착장비 굴착위치 재검토 1)1-1단계～1-6단계 2)1-12단계～1-15단계 4. 단계별 운반차량 진출입 동선 표시 5. 3단계 및 4단계는 공사장비의 재배치를 통한 점용면적 축소 조정 검토 6. 5단계는 공사단계를 2단계로 구분하여 작성 7. 6단계 교차로 구간은 별도 단계로 구분하여 작성 8. 동일관경의 공사임에도 8단계와 9단게 점용 폭원을 달리하는 사유 제시 9. 14단계, 16단계, 17단계, 18단계는 좌회전 차량에 대한 대책 제시 10. 15단계 1) 우회전 차량 주행궤적을 검토하여 우회전 가능여부 확인 2) 15단계 차량진출입 동선을 고려하여 점용면적 재검토 11. 17단계는 여유폭 1.2m를 0.5m로 축소하고 공사장 폭원을 5.5m로 확보하는 방안 검토 12. 18단계 공사중 도로 횡단면도 재검토(평면도상에서는 2차로 확보이나 횡단면도 상에는 3차로 확보로 표시) 및 17단계에 동일한 점용 폭원 확보 검토

2017. 04. 20