	서울특별시도시기반시설본부
수신자	방재시설부장
(경유)
제 목	변경계약 체결통보[난지물재생센터 환경개선사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역]

1. 방재시설부-6854(2017.4.20)의 관련입니다.

2. 귀 부서에서 의뢰한 [난지물재생센터 환경개선사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역] 계약건에 대하여 아래와 같이 변경계약 체결하였음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 변경계약 체결현황

(단위:원)

구 분	당 초		변 경
	총 차	1차	총 차	1차
계 약 자	㈜한국종합기술 외 2개사		변경없음
계약금액	2,601,723,000	180,000,000	변경없음	변경없음
준공기한	2020.05.22	2017.04.25	변경없음	2017.08.16

붙임  변경계약서 1부.  끝.

	건설총괄부장
주무관	김용범		경리과장	최정수		건설총괄부장	04/24 이상국
협조자
시행	건설총괄부-9131	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로8 프리미어플레이스빌딩 11층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2374	/전송	02-3708-2327	/	kim389@seoul.go.kr	/	부분공개(6)