문서번호	시설관리과-4137
결재일자	2017.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
정준석	정윤홍	강신재		05/02 구아미
협 조
	주무관		김동구

대형 제수밸브 점검정비 및 정밀점검 용역(강북지역)

용역 착수 보고회 개최계획

2017. 5.

상수도사업본부

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

대형 제수밸브 점검정비 및 정밀점검 용역(강북지역)

용역 착수 보고회 개최계획

우리 본부에서 추진중인 『대형 제수밸브 점검정비 및 정밀점검 용역(강북지역)』에 대한 착수 보고회 개최계획을 보고 드림.

용역 현황

❍ 용 역 명 : 대형 제수밸브 점검정비 및 정밀점검 용역(강북지역)

❍ 용역개요 : 제수밸브 점검정비 1,283개소, 내면상태 및 누수진단 3km

도․송수관 정밀점검 107㎞, 맨홀 정밀점검 5,344개소

❍ 용역기간 : ’17. 4. 3.∼12. 31.

❍ 계약금액 : 933,670원

❍ 계약업체 : ㈜한국시설안전연구원, ㈜건양엔지니어링

❍ 과업목적

- D=400㎜ 이상 대형 버터플라이 밸브 기어박스 윤활유 교체

- 도·송수관의 내면 상태 및 누수진단

- 도·송수관의 구조적 안전성·손상상태 조사후 상태평가, 종합 평가

- D=400㎜ 이상 맨홀 내·외부 정밀점검

□ 주요 사업내용

밸브 작동상태 점검	볼트 점검 및 교체	기어박스 윤활유 주입

- 대형 제수밸브 및 밸브실 점검정비

관 부식상태 조사	관대지전위차 측정	강재 및 도막두께 측정

- 도·송수관 정밀점검

- 맨홀 내·외부 정밀점검

뚜껑, 틀, 포장 단차 측정	원형 맨홀 내부 점검	구형 맨홀 내부 점검

추진현황

❍ ‘17. 4.  3. : 용역 착수

❍ ‘17. 4. 17. : 사업 설명회(중부수도)

❍ ‘17. 4. 18. : 사업 설명회(북부수도)

❍ ‘17. 4. 26. : 사업 설명회(서부수도)

❍ ‘17. 5. 10. : 사업 설명회(동부수도) 예정

공정 진행율                        (‘17. 4. 31. 기준)

구 분	계 획	완 료	공정율(%)	비 고
계	6,734	-	8.0
대형밸브 점검·정비(개소)	1,283	-	8.0	자료조사 및 내업중
도·송수관 정밀점검(㎞)	107	-	8.0
맨홀 정밀점검(개소)	5,344	-	8.0

착수보고회 개최 계획

❍ 일    시 : 2017. 5. 11.(목) 15:00

❍ 장    소 : 본부 4층 회의실

❍ 보 고 자 : 사업 책임기술자

❍ 참 석 자 : 총 20명

- 본  부 : 부본부장, 시설안전부장, 배수과장, 누수방지과장, 공간정보과장

시설관리과장, GIS 담당, 용역 담당

- 사업소 : 급수운영과장(중부, 서부), 시설관리과장(동부, 북부)

- 용역사 : ㈜한국시설안전연구원 대표이사 안평기 등 3명

㈜건양엔지니어링 대표이사 이승헌 등 3명

- 자문위원 : ㈜평화엔지니어링 전무 김정호

수자원기술 진단사업부 부장 고진혁

❍ 보고내용 : 사업추진 현황, 문제점 및 점검결과 분석 등

시 간	내 용	진 행	비고
15:00∼15:10	개회사	업무담당자
15:10∼15:20	부본부장님 인사말씀	업무담당자
15:20∼16:20	과업 수행현황 보고	사업책임기술자
16:20∼16:50	질의응답 및 토론	시설안전부장
16:50∼17:00	부본부장님 당부말씀	업무담당자

❍ 진행순서

□ 향후계획

□ 대상자 착수 보고회 참석 요청

□ 착수 보고회 개최결과 보고

□ 자문위원 수당 지급.  끝.