문서번호	토목부-6397
결재일자	2014.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이상근		이동훈	04/03 노우성
협조

기존구조물 추가 철거에 따른 실정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4.

도시기반시설본부 토목부

「서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로(보행광장) 설치 및 고척교 확장공사」

기존구조물 추가 철거에 대한 실정보고

보행광장 목동방향 가시설 작업에 기존 시설물이 저촉되고 당초 설계와 포장체의 두께 등이 상이하고, 일부 수량이 누락되어 이에 대한 실정보고를 드림.

※ 콘크리트 및 아스팔트 깨기 : 도급비 증 14,300천원, 폐기물처리비 증 10,802천원

1		관련근거

❍ 서남권(감) 2014-62(‘14.03.24.) : 실정보고(기존구조물 철거 추가)

2		공사개요

❍ 사업개요

- 보행광장 설치(B=28.3m, L=150m)

- 경사로 및 연결로 설치(N=5개소, B=5~20m)

- 고척교 확장(B=37.5m(8차로) → 52.5m(10차로), L=203m)

❍ 공사기간 : 2013. 4. 8 ∼ 2015. 2. 28

❍ 도 급 비 : 24,707백만원

❍ 시 공 사 : 대지건설(주), 한동건설(주)

❍ 감 리 사 : ㈜삼보기술단

3		감리단 보고내용

❍ 구조물깨기 현황

공 종	사 유	철거 규모	비 고
옹벽기초깨기 (콘크리트깨기)	가시설 근입 위치에 옹벽기초 저촉	B=1.9~2.7m L=150M
포장깨기 (아스콘)	포장체 두께 및 연장 상이	L=180M, T=20cm → L=150m, T=25~30cm
	지중 포장체 철거	L=40m, T=20cm
종배수관	철거수량 누락	L=30m

❍ 현황 도면

❍ 개략공사비 변경 현황

【단위 : 천원】

구 분	당 초(A)	변 경(B)	증·감	비 고
도 급 액	38,510	52,910	증 14,300
폐기물처리비	-	10,802	증 10,802
총사업비	38,510	63,712	증 25,102

4		검 토 의 견

❍ 보행광장(목동방향) 기초 공사를 위하여 굴착을 실시한바, 가시설 설치 위치에 기존 옹벽 기초로 인해 가시설 파일 근입이 불가능하여 일부 철거가 필요하며,

❍ 설계 반영되지 않은 지중 아스팔트 포장체 및 종배수관을 철거하여 신속하게 가시설 공사 추진 필요.

❍ 상기와 같이 공사를 시행하고 추후 설계변경시 반영하여 정산코자 함

붙임 : 감리단 실정보고서 1부.  끝.