투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	실정보고(관급자재 변경) 승인 통보(잠원2 빗물펌프장 전기공사)

1.업무지시현장 :  잠원2 빗물펌프장 신설 전기공사 주식회사 범한엔지니어링 종합건축사 사무소, 잠원2 빗물펌프장 신설 전기공사 (주)신명건설기술공사, 잠원2 빗물펌프장 신설 전기공사 등전전기(주)

2.작 성 일 자 : 2017-05-12 09:05:52

3.지 시 내 용 :

1) 잠원2감 2017-125호(201704.28)호와 관련입니다.

2) 위호와 관련, 『잠원2 빗물펌프장 전기공사』 시행중 강남역 역경사관로 이설에 따른 강남역 지하상가 계측제어 설비 보완 및 유지관리부서(강남구) 요구사항을 반영한 변경사항에 대한 감리 검토결과가 적정한 것으로 판단되어 승인하니 우선시공하시기 바라며

3. 우리본부 건설총괄본부(조달청)에 계약변경의뢰 하였으니 감리업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다. 끝.

- 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는

문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송

처리 됩니다.

- 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송

후 One-PMIS에서 재작성을 해주시기 바랍니다.

주무관							곽용길			열빛총괄과장					05/12 유병기
협조자
시행			설비부-7887									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8604						/전송			02-3708-8659					/	yong9345@seoul.go.kr												/	대시민공개