문서번호	방재시설부-8075
결재일자	2017.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
박중모		조성만	05/12 남궁용
협조
	주무관		이진영

『합정빗물펌프장 증설공사 건축분야 건축사 감리용역』

준공기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.05.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

『합정빗물펌프장 증설공사 건축분야 건축사 감리용역』

준공기한 연기 검토보고

우리 본부에서 시행중인「합정빗물펌프장 증설공사 건축분야 건축사 감리용역」의 준공기한 연기에 대한 검토 보고임.

용역개요

❍ 용 역 명 : 합정빗물펌프장 증설공사 건축분야 건축사 감리용역

❍ 위    치 : 서울특별시 마포구 토정로 8-3(합정빗물펌프장)

❍ 규    모 : 건축물 신축(3층, 연면적 541㎡)

❍ 용역기간 : 2016. 09. 19. ~ 2017. 04. 18.

❍ 총용역비 : 금7,600,000원

보고내용

❍ 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	비 고
기 간	'16. 09. 19. ~ '17. 04. 18.	'16. 09. 19. ~ '17. 07. 31.	증) 104일

❍ 준공기한 연기사유

- 건축분야 준공기한 연기(7. 31.)에 따른 원할한 건축공사 시행을 위한 건축사 감리용역 연기

❍ 연기에 따른 귀책소재 : 발주처

❍ 지연배상금 부과여부 : 미부과

조치의견

❍ 상기와 같이 연기하여 건축분야 건축사 감리용역 추진에 만전을  기하고자 함.  끝.