상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰

1. 우리과에서 시행하고 있는 기술용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 개요

- 계약건명: 사당로 (구)범진여객~솔밭로입구 도로확장 기본 및 실시설계용역

- 계약업체: (주)수성엔지니어링

- 준공기한 연기: (당초)2017. 5. 17.→(변경)2017. 9. 14.

나. 귀책사유: 서울특별시(지체상금 미부과)

붙임:  1) 준공기한 연기의뢰서 1부.

2) 준공기한 연기방침서 1부.

3) 합의각서(별도송부) 1부.  끝.

	도로계획과장
주무관	이시정		간선도로계획팀장	한정무		도로계획과장	05/16 하종현
협조자
시행	도로계획과-7116	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02-2133-8077	/전송	02-2133-0763	/	mryoun525@seoul.go.kr	/	대시민공개