성동소방서 신설 추진 로드맵

<2017.5.15.현재>

범례	계획
	실적

주 요 업 무		추 진 일 정
		5월					6월				7월
		15~ 21			22~ 28	29~ 4	5~ 11	12~ 18	19~ 25	26~ 2	3~ 9	10~ 16	17~ 23
공사	외부비계해체
							10%
	판넬설치
							25%
	창틀설치
	몰탈타설
	타일시공
	아스콘포장
	실내인테리어
	실내페인트
	준공청소
	준공(하자확인)
사무용가구 구매	시장조사
					50%
	제안서심의
	발주
	설치
사인몰 설치	시장조사
						25%
	유관기관 협의
	디자인협의
	디자인선정
	발주
	설치

<2017.5.15.현재>

범례	계획
	실적

주 요 업 무		추 진 일 정
		5월			6월				7월
		15~ 21	22~ 28	29~ 4	5~ 11	12~ 18	19~ 25	26~ 2	3~ 9	10~ 16	17~ 23
사무기기 구매	수량확인
	발주
	설치
회계, 후생 관련업무	사업자등록
	시금고개설
	연금공단 건강보험 공제회
	조달청 온비드
행정	상황판,관내도 제작
	관인, 회계관인 제작
	시보게재
	구내식당 종사원 모집
	공무직채용
	주요업무계획 수립
인 사	인력풀 관리
	2차 개서준비단 발령
	정기인사
개서식	주요인사 일정협의
	기본계획수립
	물품구매 및 행사준비
	개서행사

<2017.5.15.현재>

범례	계획
	실적

주 요 업 무		추 진 일 정
		5월			6월				7월
		15~ 21	22~ 28	29~ 4	5~ 11	12~ 18	19~ 25	26~ 2	3~ 9	10~ 16	17~ 23
통신,지령망 구축	지령방송 본선,예비선 확인 (방재센터,본서,안전센터)
	UPS설비 작동,지속시간 등 확인
	지령수보대 비상전용회선 확인
	IP전화기 회선 등 확인
	상황실 핫라인 구축 (구청,경찰서,방재센터)
	무전 녹취장비 확인
	무전약호지정
	상황실 운영물품 구매