Ⅳ. 주요 사업 분석

1	대전차방호시설 예술창작공간 조성	문화본부
		문화시설과

① 사업개요

○ 서울창포원 주변에 12년간 장기방치된 노후 대전차방호시설을 리모델링하여 유사시 군 기능을 유지하고 ,평상시 예술가들의 목공예 활동과 지역주민들의 생활예술공간으로 조성

- 위치 : 도봉구 도봉동 6-5일대

- 규모 : 5,478㎡, 1층 5개동 연면적 1,877.84㎡

- 사업기간 : 2015.1. ~ 2017.9.

- 총사업비 : 3,000백만원(운영비150백만원 포함)

- 공간조성 : 시민체험장, 창작공방등 예술창작공간 조성

시민동(2개동) : 교육장,체험장, 창작공방, 사무실 등

예술창작동(3개동) : 전시판매장, 입주공방, 카페테리아 등

② 2016년도 결산현황

(단위 : 백만원, %)

예산액	예산현액 (A)	집행액 (B)	다음연도 이월액(C)	집행잔액 (A-B-C)	집행률 ((B+C)/A)	2017년 예산액
-	1,451	55	1,396	-	100%	-

③ 주요 분석 내용

○ 도봉구 체육공원조성의 도시계획 및 공원계획 심의로 착공 지연

- 도봉구 공원 및 체육시설 조성과 연계한 도시․공원 계획시설 결정   행정절차 심의(도시계획 7.19 심의, 공원계획 8.18 심의)로 지연

- 군과의 협의과정에서 요청된 사항 등을 반영함에 따라 실시설계   기간 연장(당초 `16.1.12. → 11.23.)

○  ‘16년 8월 행정절차 완료, ‘16년 12월 군부대 MOU체결 후 ’16년 12월 착공하여 ’17년 7월 준공예정으로 예산 100% 집행 예정임.