“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	치수과-11640		주무관	치수팀장		치수과장		안전교통국장		부구청장
			정영상	윤석빈		강태근		박은섭		전결 05/18 주윤중
등록일자	2017.5.17.
결재일자	2017.5.18.
공개구분	부분공개(5)
			협조자		행정국장		이창훈
					재무과장		정한호
					계약팀장		박성희

-삼성1배수분구 하수관거 종합정비공사(장기계속)-시비사업

설계변경(4차 1회) 시행계획

□ 관련근거

- 설계변경 도서제출〔동부엔지니어링 2017-1073호(2017.5.8.)〕

□ 설계변경 사유

- 삼성1배수분구 종합정비공사 건설사업관리단 공사실정보고 반영

· 민원발생에 따른 포장변경 및 노후, 파손 L형 측구깨기, 설치 물량 반영

· 하수관 노후, 파손으로 인한 하수관거 추가정비 물량 반영

□ 공사비 증·감 현황(4차1회)                          (단위:원)

구 분	계약금액	변경금액	증 ․ 감
총 공 사 비	1,780,000,000	1,780,000,000		0
도 급 비	815,900,000	1,235,200,000	증	419,300,000
관 급 비	415,346,000	173,196,000	감	242,150,000
이 전 비	548,754,000	371,604,000	감	177,150,000

□ 조치계획

- 삼성1배수분구 종합정비공사 건설사업관리단 설계변경 보고사항에 대해

승인하고, 설계변경(총차7회, 4차1회) 시행코자 함.

2017.  5.    .

	강 남 구
(		치수과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 추진경위 : 삼성1배수분구 설계변경도서(총차7회, 4차1회) 제출
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 해당 없음
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 거주민 및 시민다수
분 야 별 검토사항 [계속 : ○ ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ● ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ● ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	•
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당사항 없음.
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 무

- 삼성1배수분구 하수관거 종합정비공사(장기계속) -

설계변경(4차 1회) 시행계획

『삼성1배수분구 하수관거 종합정비공사(장기계속)』 관련하여 삼성1배수

분구 종합정비공사 건설사업관리단으로부터 제출된 설계변경도서(총차7회,

4차1회) 검토의견서에 대한 검토 보고임.

Ⅰ	관 련 근 거

삼성1배수분구 종합정비공사 건설사업관리단 동부엔지니어링 2017-1073호

(2017.5.8) : 삼성1배수분구 설계변경(총차7회, 4차1회) 도서제출

Ⅱ	사 업 개 요

공 사 명 : 삼성1배수분구 하수관거 종합정비공사(장기계속)

사업기간 : 2014.7.28 ~ 2017.12.31(4차분 : 2017.2.1~2017.12.31)

공사규모 : 하수관거 신설 및 정비 D=300㎜~1,200㎜, L=11,850m

- 4차분 : D=450㎜~800㎜, L=2,023m

사 업 비 : 시비 12,215백만원 【도급 7,650백만원, 관급 2,838백만원, 이전 1,727백만원】

- 4차분 : 시비 1,780백만원 【도급 816백만원, 관급 415백만원, 이전 549백만원】

시공/감리 : 경동산업(주)/동부엔지니어링(주)

Ⅲ	설계변경 현황

설계변경 사유

- 삼성1배수분구 건설사업관리단 공사 실정보고 사항 반영

· 민원발생에 따른 포장변경 반영

· 공사구간 인접 노후, 파손 L형 측구깨기 및 설치 추가물량 반영

· 하수관 노후, 파손으로 인한 하수관거 추가정비 물량 반영

주요 설계변경 내용

연번	변 경 사 유	관련근거(공문)
1	ㅇ 포장변경에 따른 실정 보고 - 당초 설계에 반영되어 있는 ASP-CON’C(표층:5㎝, 콘크리트포장:20㎝, 4m이하도로)복구시 복구층의 양생기간 소요로 인해, 인근 주민 통행불편 민원이 발생되어 ASP(표층:5㎝, 중층:7.5㎝)로 포장변경을 실시하여 주민 통행불편 해소	ㅇ삼성1 제2017-11호 (2017.3.8.)
2	ㅇ L형 측구깨기 및 설치 추가정비 실정 보고 - 금년 4차 공사 내역에 하수관 개량구간 2,023m중 측구를 포함한 노후 도로경계블록 82m만 정비토록 반영되어 있으나, 노후 파손된 측구 보수와 도로경계블럭을 도로경계석으로 교체하여 달라는 민원이 많이 발생되어 노후, 파손된 측구 및 경계블럭 추가정비 시행	ㅇ삼성1 제2017-13호 (2017.3.14.)
3	ㅇ 하수관거 추가정비 실정 보고 - 6구역 시행 중 정비사업구간외 추가 CCTV하수관거 현황조사 실시결과 관노후, 파손 및 준설토퇴적상태가 심각하여 하수관거 추가정비 필요	ㅇ삼성1 제2017-22호 (2017.4.5.)
4	ㅇ 관급자재 구매 및 이월물량 계획 보고 - 삼성1배수분구 하수관거 종합정비공사 1차, 2차 사업 시행 시 예산 집행 후 관급자재 잔여금으로 추가 구매한 관급자재를 금번 4차 공사에 소요되는 관급자재로 사용	ㅇ삼성1 제2017-16호 (2017.3.17.)

❍ 공사물량 증·감 현황

구 분	공 사 물 량 증 ․ 감			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
총차7회	하수관거 신설 및 정비 D=300㎜~1200㎜ L=11.58㎞	하수관거 신설 및 정비 D=300㎜~1200㎜ L=11.52㎞	(감)0.06㎞
4차1회	하수관거 신설 및 정비 D=450㎜~800㎜ L=2.02㎞	하수관거 신설 및 정비 D=450㎜~800㎜ L=2.14㎞	(증)0.12㎞

❍ 공사비 증·감 현황

가. 총차7회                                              (단위 : 원)

구 분		계 약 금 액	변 경 금 액	증 ․ 감
총 공 사 비		12,215,973,700	12,215,973,700		0
도급비	계	7,650,279,000	8,004,130,000	증	353,851,000
	공 급 가 액	6,954,799,091	7,276,481,819	증	321,682,728
	부가가치세	695,479,909	727,648,181	증	32,168,272
관 급 비		2,837,902,840	2,569,213,000	감	268,689,840
이 전 비		1,727,791,860	1,642,630,700	감	85,161,160

나. 4차1회                                               (단위 : 원)

구 분		계 약 금 액	변 경 금 액	증 ․ 감
총 공 사 비		1,780,000,000	1,780,000,000		0
도급비	계	815,900,000	1,235,200,000	증	419,300,000
	공 급 가 액	741,727,273	1,122,909,091	증	381,181,818
	부가가치세	74,172,727	112,290,909	증	38,118,182
관 급 비		415,346,000	173,196,000	감	242,150,000
이 전 비		548,754,000	371,604,000	감	177,150,000

※ 본 건은 신규공종 없는 단순 수량 증·감에 의한 설계변경으로서 설계변경심의

제외 대상임.

❍ 제비율 검증결과 : 적정함

Ⅳ	건설사업관리단 검토의견

상기 보고내용과 같이 실정보고 및 공종별 시공물량 반영사항으로서 설계변경(총차7회, 4차1회)은 적정하다고 사료됨.

Ⅴ	조 치 계 획

건설사업감리단 설계변경 검토사항에 대하여 승인처리 및 설계변경 시행하여 삼성1배수분구 주변 침수피해 예방 및 주민생활 불편해소에 만전을 기하고자 함.

붙임 1. 건설사업관리단 설계변경 검토의견 공문 1부.

2. 계약심사(설계변경) 결과통보 1부.

3. 일상감사 결과회신 1부.

4. 제비율검증표 1부.

5. 설계변경내역서(총차7회, 4차1회) 각 1부.

6. 실정보고 검토보고서 1부. 끝.