문서번호	기전과-2392
결재일자	2014.4.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	기전과장
차준원	채희준	04/04 최주용

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

준공기한 연기요청에 따른 검토 보고(옥수12-신호,표지)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 04

성동도로사업소

(기 전 과)

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

준공기한 연기요청에 따른 검토 보고

교통안전시설물 원인자 부담공사 준공기한 연기 요청이 있어 관련서류 및 현장 확인후 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 교통안전시설물 원인자 부담공사-옥수12구역(신호,표지)

공사구간 : 서울시 성동구 옥수동 500번지 일대 주변도로

공사기간 및 지연사유

구분	공사기간		지연사유
	변경 전	변경 후
신호	2012.04.03.~2014.03.30	2012.04.03.~2014.04.30	횡단보도 내 지장물 이설 지연
표지	2012.12.28.~2014.03.30	2012.12.28.~2014.04.30

원인자 및 관련업체 현황

구분	설계	감리	시공	원인자
신호	㈜웨텍	㈜영호이앤씨	㈜건영이앤씨	삼성물산(주)
표지			태경이앤지(주)

Ⅱ		검 토 결 과

-교통안전시설물 설치에 대한「교통안전시설물 원인자부담공사」준공기한 연기요청 건에 대하여 검토 한바, 횡단보도내 지장물 이설로 인하여 공사가 지연되어 상기공사에 대하여 준공기한을 연기 승인코자 합니다.

첨  부 : 1. 준공기한 연기요청 1부. 끝.