문서번호	시설보수과-4519
결재일자	2017.5.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★전문관		시설보수과장	북부도로사업소장
김영원		이근봉	05/22 신응수
협조

미집행 예산(낙찰차액) 활용계획 보고

(월계2,3지하차도 보수공사)

2017. 5.

북부도로사업소

시설보수과

미집행 예산(낙찰차액) 활용계획 보고

(월계2,3지하차도 보수공사)

월계2,3지하차도 보수공사의 전면 포장보수를 위해 미집행 예산

(낙찰차액)을 활용 보수코자 함.

관련근거

지방자치단체 세출예산 집행기준(안전행정부 예규 제65호, 2014.1.1)

- Ⅲ. 비목별 세부집행지침 13-1. 시설비(401-01): 동일 편성목 내의 낙찰차액 집행가능

공사개요

계약건명 : 월계2,3지하차도 보수공사공사

계약금액 : 423,658,700원

공사기간 : 2017. 4. 19 ∼ 2017. 10. 31

계 약 자 : 태원건설 ㈜ 대표  김 성 원

미집행 예산(낙찰차액) 사용계획 : 67,161,300원

관급자재 아스콘 추가 구매

- 당초 발주시 배정된 예산으로는 전면포장 보수를 할 수가 없어 예산에 맞추어

관급자재를 구매함에 따라 전면 보수를 위해서는 추가 구매가 필요 함.

(아스콘 구매현황)

품 명	당 초		추 가
	수 량	금액	수 량	금액
표층용 78	1,624톤	96,519,730원	380톤	23,000,000원

기타 슬래브하브 열화면 추가 보수 등 물량 증가부분에 할용

조치의견

추가 소요되는 공사금액은 현재 시행중인 공사의 낙찰차액(67,161,300원) 을 활용 집행 후 추후 설계변경시 반영처리 .끝.