투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	관급자재(통기관) 수량 변경 (2017년 여의도 이용숲 조성공사)

우리 본부에서 추진 중인 “2017년 여의도 이용숲 조성공사 ”에 소요되는 관급자재에 대하여 아래와 같이 수량변경을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 변경내역

물품분류 번호	품명	규격	단위	당 초		변 경		증 감
				수량	금액	수량	금액	수량	금액
22766994	통기관	D100*L300	EA	768	4,377,600	807	4,599,900	증)39	증)222,300

나. 변경사유 : 시공물량 변경에 따른 관급자재 변경구매.

붙임 설계변경 검토보고 및 변경계약서 1부.  끝.

	생태공원과장
주무관			생태공원과장
협조자
시행	생태공원과-1596	(	2017.5.23.	)	접수	총무과-8474	(	2017.5.23.	)
우			/
전화	3780-0630	/전송	3780-0745	/		/	비공개(5)