문서번호	정수시설과-1833
결재일자	2017.5.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
함인석		김긍채	05/24 임철수
협 조
	주무관			김종원

조경관리용역 감독수행 보고

2017.  5.

조경관리용역 감독수행 보고

강북아리수정수센터 조경관리용역 감독수행중 축구장 주변 잔디식재,

고사수목 벌목 등을 시행하여 안전사고를 예방하고자 함.

□ 용역현황

○ 공 사 명 : 2017년 강북아리수정수센터 조경관리용역

○ 계약 금액 : 151,019천원

○ 계약 기간 : 2017. 4.19 ~ 12.10

○ 계약 업체 : (주)송현조경 대표 조양여

□ 보고내용

○ 인조잔디 축구장 조성공사의 측구 배수로 신설에 따른 절토 부위 잔디식재

- 잔디식재(3개소) : 4.5×70ⅿ＋4×30ⅿ＋6×20ⅿ ＝ 555㎡

- 소요예산 : 11,000천원

잔디식재(4.5×70ⅿ)	잔디식재(4×30ⅿ)	잔디식재(6×20ⅿ)

○ 고사된 수목 벌목(4주)하여 안전사고 예방

- 은행나무 1주, 단풍나무 3주

- 소요예산 : 1,000천원

은행나무	단풍나무	단풍나무	단풍나무

□ 처리의견

○ 인조잔디 주변 잔디식재, 고사된 수목(4주) 벌목처리는 현재 계약

되어 시행중인 강북아리수정수센터 조경관리용역 업체인 ㈜송현조경에

작업지시를 하여 시행하고자 함.

○ 신규 물량은 낙찰율 적용하여 설계변경시 반영코자 함.끝.